제 안 요 청 서

용 역 명	2021년 첨단 ICT활용 시범교실 구축·운영 지원사업 해외교실 구축
주관기관	(사)에이펙국제교육협력원

2021. 8.

담당	소속부서	직위	성명	전화번호	이메일
	국제역량 개발 2팀	팀장	선현웅	053-719-2941	luissun@alcob.org
	경영지원팀	주무	권명근	053-719-2959	kmg8342@alcob.org

			목 차

Ⅰ. 사업 안내	1

Ⅱ. 과업내용	3

Ⅲ. 제안요청내용	14

1. 첨단교실 공사	14

2. 첨단교실 ICT 활용 기자재 공급	15
3. 협력국 첨단교실 ICT활용 기자재 연수 및 사후관리 지원	17

Ⅳ. 제안 안내	18

1. 계약 조건	18

2. 제안서 작성 및 제출	22

3. 제안 유의사항	28

Ⅴ. 제안서 평가 및 선정 안내	31

1. 제안서 평가	31

2. 선정 안내	33

[붙임1] 제안서 평가기준	35

[붙임2] 첨부자료(관련 서식)	37

	Ⅰ		사업 안내

용 역 명 : 2021년 첨단ICT활용 시범교실 구축·운영 지원사업
해외교실 구축

사업기간 : 계약체결일로부터 180일 (약 6개월)

* 사업기간 조정 필요시, 자연재해(COVID-19포함) 및 교류협력국 사정 등으로 인한 사유 발생 시 상호간 협의를 통해 사업종료일자 변경 가능

사업예산 : 총 850,000,000원 (일금 팔억오천만원 정)

* 부가가치세법 제21조(재화의 수출) 제 1항에 따라 “수출하는 재화”로 간주되는 경우,
동법 제22조(용역의 국외공급)에 따라 “국외에서 공급하는 용역”에 해당하는 경우는
부가가치세법상 영세율을 적용할 수 있음(단, 영세율 적용에 관한 증명 및 제반 절차와
그 책임은 계약상대자에 있음)

* 면세사업자의 경우 부가가치세를 포함하여 투찰하여야 하며, 입찰결과 면세사업자가 낙찰자로 선정되었을 때 낙찰금액에서 부가가치세 상당액을 차감한 금액을 계약금액으로 함

* 본 기관은 소프트웨어 진흥법 제21조(소프트웨어프로세스 품질인증)의 4와 동법 시행령 제21조(국가기관등의 범위)에 따라 공공소프트웨어 해당법령의 적용대상이 아님

사업자 선정방식 : 일반(총액)경쟁, 협상에 의한 계약

사업내용

	<용어정리>
▪ 본 제안요청서에서 “(사)에이펙국제교육협력원”을 “수요기관”이라 명칭 함. ▪ 본 제안요청서에서 “입찰 참여업체”를 “제안사”라 명칭 함.

○ 교실 구축 사전 조사

- 사업 범위 및 진행에 관한 수요기관의 요구사항 정의

- 요구사항에 기반한 교실 설계 및 구현 관련 협의

○ 기자재 공급 및 운송

- 교실 구축에 필요한 기자재 조달

- 구축 국가까지 해당 기자재에 대한 운송 및 운송관련 전반업무

○ 첨단교실 리모델링 및 기자재 설치

- 첨단교실 리모델링 실시

- 첨단교실 기자재 설치 및 검수, 하자보수 지원
※ 하드웨어 24개월, 소프트웨어 12개월

○ 기자재 활용 연수 및 기술이전

- 현지 연수 지원 및 연계행사 개최 지원

- 기자재 활용에 관한 기술이전

○ 사업관리 : 기타 사업수행에 관한 관리업무 전반

※ COVID-19로 인한 출장관련 추가비용(격리비용 등)에 대해서는 별도의 추가집행 불가

추진일정

○ 사업 추진 일정(안)

구 분	2021					2022
	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월
▪ 사업자 선정
▪ 사전조사_ 현지교실 실측 및 설계
▪ 사전조사_ 기자재 설치환경 조사
▪ 기자재 선정 및 구매
▪ 기자재 운송 및 통관
▪ 첨단교실 구축_ 교실 리모델링
▪ 첨단교실 구축_ 기자재 설치
▪ 첨단교실 구축_ 시스템 테스트
▪ 개소식 및 포럼 지원*

* COVID-19로 인한 개소식 및 포럼 일정의 연기 가능성 존재하며 양국 간 협의로 필요시 변경 가능

- 이 하 여 백 -

	Ⅱ		과업내용

과업대상 : 2021년도 교류협력국 2개국(부탄, 파라과이)

구분	부탄		파라과이
학교명	Dechencholing Higher Secondary School (유치원~12학년 공립학교)	Loselling Middle Secondary School (유치원~10학년 공립학교)	Centro Educativo Campo Verde (유치원~12학년 공립학교)
전체 학생수 (학급당 학생수)	1,785명 (46명)	1,358명 (48명)	346명 (30명)
교실크기 (내측)	7,010.4mmX10,424.16mmX3,048mm (6,940mmX9,880mmX3,070mm)	12,000mmX6,290mmX3,000mm (11,700mmX6,840mmX2,510mm)	7mX14mX3m
지역	팀부		아순시온

과업범위

○ 과업 범위별 주요활동 내역(종합)

과업범위	주요활동	활동내용	주요사항
사전조사	요구사항 정의	▪ 구축일정 협의, 대상 업무현황 파악, 자료수집, 구축방안 결정 ▪ 교실 리모델링 및 ICT 기자재 활용에 대한 요구사항 파악 ▪ 협력국 요구사항 수렴 및 확정	첨단교실의 구축 안정성 확보
	설계 및 구현 협의	▪ 첨단 ICT 활용 교실 구축 리모델링 설계안 협의 및 공사내용 확정 ▪ 첨단교실 교수학습방안 설계 ▪ 교실별 기자재 세부 사양 확정 ▪ 현지 설치조건(전압/주파수, 정전기, 항온항습, 최고/최저 온도, 배선 가능 여부 등) 조사 ▪ 첨단교실 기자재 운송 일정 협의 및 통관 절차 확인
기자재 공급 및 운송	기자재 공급	▪ 기자재 선정 및 사양 작성 ▪ 기자재 확정 및 구매 ▪ 자체 기자재 검사 ▪ 기자재 스펙(종류, 수량, 사이즈 등) 관련 물류 견적 확보	현지별 정확한 통관 서류 및 절차 확보
	기자재 운송	▪ 기자재 수출 포장 ▪ 보험가입 ▪ 수출통관 및 선적 ▪ 수입통관 및 운송/보관 ▪ 물품수령확인

과업범위	주요활동	활동내용	주요사항
첨단교실 리모델링 및 기자재 설치	첨단교실 리모델링	▪ 첨단교실 모형에 적합한 교실 인테리어 공사 (천장/바닥/벽면포함) ▪ 첨단교실 수업운영 시 교사 및 학생의 동선, 기자재 설치를 고려한 가구 배치 ▪ 기자재 보관을 위한 수납공간 공사	첨단교실 리모델링 및 기자재의 가용성 증대
	첨단교실 기자재 설치 및 검수	▪ 첨단교실 기자재 활용을 위한 각종 기자재 설치 ▪ 첨단교실 기자재 시험운영 및 최적화 ▪ 첨단교실 수업 운영을 위한 기자재 테스트 및 최적화 ▪ 기자재 규격 및 수량 확인 ▪ 기자재 활용 수업 현지 테스트
	하자보수	▪ 첨단교실 기자재 설치 완료 및 검수 후 H/W 2년(24개월), S/W 1년(12개월)간 하자보수 ▪ 서비스 장애에 대한 대응방안 수립 ▪ 현지 유지관리 계획 수립	유지보수성 확보
기자재 활용연수 및 기술이전	현지 연수 지원 및 연계행사 개최	▪ 첨단교실 기자재 및 시스템 활용 교육 ▪ 첨단교실 기자재 장애 대응 교육 ▪ 교수법 역량강화 연수 일정 및 연수내용 연계성을 고려하여 추진 ▪ 첨단교실 개소식 및 포럼 지원 - (개최시기) 사업 최종점검 단계 - (목적) 행사장 시설확인 및 무대·음향 설치, 행사 운영인력 배치·관리, 기자재 설치 결과 시연	시스템의 지속가능성 증대
	기술이전	▪ 지속적인 기술이전 활동과 체계적인 교육을 통한 기술이전 수행 ▪ 시스템 운영 직원의 자체 유지보수 능력 배양을 위한 기술 이전
사업관리	사업관리	▪ 일정 및 진척 관리 ▪ 의사소통 관리 ▪ 리스크 및 이슈 관리 ▪ 범위 및 변경 관리 ▪ 이해관계자 관리 ▪ 품질 관리	안정적인 프로젝트 지원

○ 교실구축 과업 개요(부탄_교실 2실)

구분

내용

공간

구성

▣ 교실 전면 : 다목적 창의 발표 및 온라인 스튜디오(교사 강의 및 학생 발표)

▪ 대형 IFPD(전자칠판)과 전면장을 활용해 대형 화면에 학습자료를 제시하면서
교구나 교재, 서적 수납공간

- 2개소 대상 교실 구조 상의 특징(출입문 위치) 고려

- 통합 컨트롤러와 음향시스템이 내장된 전자교탁을 활용하여 효율적인 수업 진행 및 대형 화면의 가독성 확보(가려지는 위치가 아닌 측면에 교사 위치)

- 교원연수센터로의 기능 및 일반교실에서의 활용을 고려하여 충전관련
시설은 전면장에 내장하지 않고 별도의 이동식 충전함 구비

▪ PTZ카메라와 천정 매립형 크로마키 스크린으로 온라인 스튜디오 구축

- 코로나 19 지속 혹은 전염병 등 온라인 수업 운영이 필요할 경우 구글
클래스 룸 등 온라인 수업 플랫폼을 활용한 O2O(online to offline) 플랫폼 공간 마련

▣ 교실 중앙 : 아이디어 발전 공간

▪ 모둠별 프로젝트학습, 문제해결학습, 탐구학습 등의 학생 참여중심
수업과 창의적인 교육과정을 운영할 수 있는 공간

▪ 가변형 책상과 모둠별 모니터(혹은 빔프로젝터)를 활용하여 상시 토의 및
기록을 공유하고 협업이 가능한 공간

▪ 교구 및 가방 등의 간이 수납 및 실적물 전시대로 활용이 가능한 수납형
의자(현지 요청 시 높이·각도조절 가능한 일반 의자 형태로 변경 가능)

▣ 교실 후면 : 다목적 창의 발표 및 팀 공간(교구 수납, 충전 및 팀 활동 공간)

▪ 제한된 교실 공간에서 교구를 수납하면서 입식 테이블 위에서 팀별 활동 및 발표 준비 등 다용도로 활용할 수 있는 공간

- 테이블 폭을 80cm 이상 확보하여 입식 테이블로 활용 가능하도록 구성

- 피지컬컴퓨팅, 언플러그드 교구를 수납하여 체계적인 관리가 되도록 지원

▪ 이동식 충전 보관함으로 랩톱PC 및 태블릿PC 관리 편의성 고려 및
일반교실에서의 활용 및 보관 지원

교수학습

방법

▣ 액션러닝, 프로젝트 활동, 사회문제해결 프로젝트 학습(S-PBL) 등

특징

▣  전 교과목 수업과 온라인 수업을 위한 영상 촬영이 가능한 다목적 수업공간

▣  교과 수업 외 교사, 학생 간 다양한 활동을 할 수 있는 커뮤니티 공간

▣  편안하게 모여서 학생들이 무엇인가 만들어 낼 수 있는 공간

고려

사항

▣  교원의 첨단 ICT 기자재를 활용을 위한 기초역량 배양 교육

▣  ICT 활용을 통한 디지털 수업, 미래역량을 강화할 수 있는 교육

▣  확장 및 일반화 가능성이 높은 기자재를 투입하여 누구나 활용할 수 있는 공간 구성

▣  학급 당 학생수(Dechencholing HSS, 최대 46명) 및 TRC(교원연수센터,
Loselling MSS)로의 활용도 고려하여 최대 48명 수용 가능한 공간구성

기대

효과

▣  교실수업 및 학습 경험의 질 개선을 통한 미래학습 구현에 기여

▣  미래형 학습도구 확충, 교육용콘텐츠 개발, 교원 정보화 역량 강화, 학교 특색
프로그램 운영을 통한 교수학습 모델 일반화에 기여

▣  첨단교실의 성과를 공유·확산하고, 지역 거점학교로서 선도적 역할 제고

부탄 [Dechencholing Higher Secondary School]

▣ 설계도면

▣ 주요사항

▪ 협소한 교실공간을 고려하여 학급 최대 인원수, 그룹활동 등 다양한 형태로의 교실 활용
가능성 등을 반영하여 상판 접이식 테이블이 고려되어야 함

▪ 위 배치도면은 강의식 교수학습 활동 기준으로 작성되었으며, 테이블 배치를 다르게 하여
다양한 좌석 배치가 가능하도록 함

▪ 이동형 전자칠판의 경우 교실 후면과 측면에 배치하여 자유롭게 이동이 가능하도록 함

▪ 창문과 창문 사이에 화이트보드를 설치하며, 기존 창문은 살리고 폭 60cm 정도의
수납장을 만들어 상부까지 동일 재질로 마감처리가 되어야 함

▪ 억세스플로어 시공을 통해 하부에서 전원이 토출되어야 함

▪ DID는 위 도면상 우측(교실 뒷편)에 2EA설치되어야 함

▪ 캐비닛과 스탠딩 테이블이 있는 벽면은 타공판으로 마감하여 학생 실적물 및 전달사항
등이 부착될 수 있어야 함

▣ 도입장비 내역

구분	내역	수량	구분	내역	수량
첨단 강의 시스템 부문	전자칠판	1	강의 지원 부분	DVD 플레이어	2
	전자교탁	1		화상카메라	46
	통합 컨트롤러	1		저반사 아크릴 보드 칠판	4
	PTZ 카메라 (Pan, Tilt, Zoom)	2		천장형 자동전선릴	10
	블루투스 동글	2	기타 지원 부문	수납장 설치 (현지 배치 공간 측정 필요)	협의
	이동형 전자칠판	4		노트북 충전함	3
	무선 인터넷(AP)	2		책상	24
	크로마키 스크린	1		바퀴 달린 매쉬 재질 의자	48
음향 부문	추가 스피커	4		DID / KIOSK	2
	AMP	1		(노트북) 외장형 DVD 드라이브, 카드리더기 및 USB 허브	48
	SPEAKER	4		스캐너	1
	무선마이크 (핸드, 핀 2채널 이상)	1		프린터	1
강의 지원 부분	노트북	46		UPS	1
	헤드셋	46		추가 지원 소모품/배선/냉난방배관 등	협의
	캠코더	2		네트워크 허브 RACK CABINET	1
	교사용 컴퓨터	2		CCTV	1
	교사용 컴퓨터용 모니터	2		교육용 소프트웨어 리스	50

* 구성항목별 자세한 사양은 세부규격서 참조

부탄 [Loselling Middle Secondary School]

▣ 설계도면

▣ 주요사항

▪ 학급 최대 인원수, 그룹활동, TRC(교원연수센터)로서의 활용 가능성 등을 반영하여 상판
접이식 테이블이 고려되어야 함

▪ 위 배치도면은 그룹 활동 기준으로 작성되었으며, 테이블 배치를 다르게 하여 다양한
좌석 배치가 가능하여야 함

▪ 이동형 전자칠판의 경우 교실 측면에 비치하여 미러링 기능 및 터치 기능을 활용하여 화이트보드와 함께 사용이 가능하여야 함

▪ 창문과 창문 사이에 화이트보드를 설치하며, 기존 창문은 살리고 폭 60cm 정도의 수납장을 만들어 상부까지 동일 재질로 마감처리가 되어야 함

▪ 억세스플로어 시공을 통해 하부에서 전원이 토출되어야 함

▪ DID는 후면 문과 문 사이에 설치되어야 함

▪ 캐비닛과 스탠딩 테이블이 있는 벽면은 타공판으로 마감하여 학생 실적물 및 전달사항
등이 부착될 수 있어야 함

▣ 도입장비 내역

구분	내역	수량	구분	내역	수량
첨단 강의 시스템 부문	전자칠판	1	강의 지원 부분	DVD 플레이어	2
	전자교탁	1		화상카메라	48
	통합 컨트롤러	1		저반사 아크릴 보드 칠판	6
	PTZ 카메라 (Pan, Tilt, Zoom)	2		천장형 자동전선릴	10
	블루투스 동글	2	기타 지원 부문	수납장 설치 (현지 배치 공간 측정 필요)	협의
	이동형 전자칠판	6		노트북 충전함	3
	무선 인터넷(AP)	2		책상	24
	크로마키 스크린	1		바퀴 달린 매쉬 재질 의자	48
음향 부문	추가 스피커	4		DID / KIOSK	2
	AMP	1		(노트북) 외장형 DVD 드라이브, 카드리더기 및 USB 허브	48
	SPEAKER	4		스캐너	1
	무선마이크 (핸드, 핀 2채널 이상)	1		프린터	1
강의 지원 부분	노트북	48		UPS	1
	헤드셋	48		추가 지원 소모품/배선/냉난방배관 등	협의
	캠코더	2		네트워크 허브 RACK CABINET	1
	교사용 컴퓨터	2		CCTV	1
	교사용 컴퓨터용 모니터	2		교육용 소프트웨어 리스	51

* 구성항목별 자세한 사양은 세부규격서 참조

- 이 하 여 백 -

- 이 하 여 백 -

○ 교실구축 과업 개요(파라과이_교실 1실)

구분

내용

공간

구성

▣ 구축 컨셉

▣ 교실 전면 : 강의 및 수납공간

▪ 좌우 상단 자석식 난반사유리칠판 및 수납공간
(노트북 수납 및 충전 교구수납)

▪ 전면 초단초점 듀얼 전자칠판을 활용하여 교사자료와 학생 피드백을 실시간으로 보여주거나 2가지의 학습자료를 동시에 제시 가능

▪ 통합 콘트롤러와 음향시스템이 장착된 좌·입식 겸용 전자교탁을 활용 하여, 보다 효율적인 수업 진행 가능

▣ 교실 중앙 : 아이디어 발전 공간

▪ 제한된 교실공간에서 모둠별 프로젝트학습, 문제해결학습, 탐구학습 등의
학생 참여중심 수업과 창의적인 교육과정을 운영할 수 있는 공간

▪ 모둠별 전자칠판과 가변형 책상을 활용하여 상시 토의 및 기록을
공유하고 협업이 가능한 공간

▪ 다학년 및 사용학년 고려한 원터치 높이·각도조절 책상 및 현지 기후를
반영한 에어로 풀메쉬 학생의자

▣ 교실 후면 : 다목적 창의 발표 및 팀 공간(교사 강의 및 학생 발표, 팀 공간)

▪전통과 혁신의 초연결·융합공간

- 한국의 전통문화와 건축양식『한옥, 서당, 대청마루, 마당』 등의 개념에 혁신적 교수·학습법 적용이 가능한 창의적인 교육 활동공간

▪기존 획일적이고 평면적인 교실에서 벗어나 한국의 전통문화를 살린 공간에서 자유롭고 창의적 학습 및 표현활동이 가능한 입체적 공간
(서당과 마당의 개념 적용)

▪대청마루(팀공간)와 마당(무대)의 공간을 구성하여 팀 공간, 개별학습 및 휴식 공간, 발표와 공연의 공간으로 다목적 활용 가능

▪마당(무대) 공간은 평상시 빈백 또는 러그를 활용하여 자유활동이나 휴식 공간으로 활용

▪빔프로젝터를 전동스크린에 비추어 넓은 화면을 활용하여 강의자료나 무대배경을 디스플레이 할 수 있도록 구성

▪전통문 디자인을 적용한 다목적 교구실

▣ 복도 게시공간 및 출입문

▪한국 전통디자인 시스템창호와 인테리어 출입문 교체 설치, 한옥벽
인테리어

▪대한민국&충북의 문화·교육·역사, 한류 등 소개(한국관광공사 홍보영상) 및 학생 게시공간 활용(디지털 사이니지)

▣ 교실환경 전반 : 천정형 냉·난방시스템, 실내 무선방, LED평판등, 엑세스플로어(바닥전원)

교수학습

방법

▣ 스마트러닝, 문제해결학습, 프로젝트학습, 현상기반학습(PBL) 등

특징

▣ 초연결과 융합을 컨셉으로 대한민국(충북)과 파라과이의 전통과 혁신,
과거·현재·미래, 창의융합교육, 미래인재양성, 교수학습법 등을 서로 연결하고 공유하고 융합할 수 있는 공간

▣ 다양한 교과목 수업 및 회화학습 등의 다양한 형태의 강의와 학생 참여
중심 수업, 학습 발표가 가능한 다목적 수업공간

▣ 교과 수업 외 교사, 학생, 지역사회의 다양한 활동과 소통을 지원할 수 있는
커뮤니티 및 창의적인 활용 가능 공간

▣ 지역사회와 공유하여 다양한 활동과 교육활동 지원이 가능한 공간

고려

사항

▣ 한국의 전통과 문화를 살리고 홍보할 수 있는 인테리어

▣ 교수 및 학습 과정에서 누구나 쉽고 간단하게 활용 가능한 ICT 기자재

▣ 인터넷이 제한된 환경에서도 ICT 활용을 통한 디지털 수업이 가능한 교실 구축

▣ 다양한 교과 수업 및 지역사회 연계 교육 진행을 위해 확장 가능성이 높은
기자재를 투입하여 누구나 활용이 가능한 공간구성

기대

효과

▣ 첨단 교수·학습 공간을 활용한 교실수업 및 학습 경험의 질 제고를 통하여
미래학습 구현 및 파라과이 미래인재육성에 기여

▣ 미래형 교수·학습도구 확충, 교육용콘텐츠 개발, 교원 정보화 역량 강화,
학교 특색 프로그램 운영을 통한 교수학습 모델 일반화에 기여

▣ 공교육 기반 첨단미래학교로서의 성과를 공유·확산하고, 지역 거점학교로서
선도적 역할 제고

▣ 한국(충북)과 파라과이 간 문화 및 교육 공감대 형성과 긍정적 국가 인식 제고

파라과이 [Centro Educativo Campo Verde]

▣ 설계도면

▣ 도입장비 내역

구분	내역	수량	구분	내역	수량
첨단 강의 시스템 부문	초단초점 인터랙티브 프로젝터	2	기타 지원 부문	무선 AP(ACCESS POINT)	2
	화면투사용 보드	1		기가 스위칭 허브 (24포트)	2
	빔프로젝터	1		네트워크 허브 RACK CABINET	1
	전동매립대형스크린	1		추가 지원 소모품/배선/냉난방배관 등	협의
	모둠별 협업용 전자칠판	4		학생용 책상	30
	전자칠판 이동형 거치대	4		학생용 의자	30
	웹캠겸용 AI카메라	1		교사용 의자	1
	웹캠(천정용)	1		마루형 팀공간 협탁	3
	웹캠(교탁용)	1		러그	4
	디지털 좌입식 겸용 전자교탁	1		빈백	8
음향 부문	무선핀마이크 송수신기 세트	1		LED 평판등	11
	추가 스피커(100W 이상)	2		LED 멀티 파라이트 조명	4
강의 지원 부문	노트북	30		LED Warm 화이트 조명	4
				DMX 콘트롤러 조명 콘솔	1
	어학학습용 헤드셋	30
				DMX 콘트롤러 조명 콘솔	1
				수납장 설치 (현지 배치 공간 측정 필요)	협의
	데스크탑 PC본체	1
	모니터	1
				노트북 충전함	1
	일체형 올인원PC	3
				CCTV	1
	실물화상기	1
	천정형 냉난방기(설치포함)	2		UPS	1
	디지털 사이니지	6		교육용 소프트웨어 리스	44
	레이져 컬러 프린터기 및 토너	1

* 구성항목별 자세한 사양은 세부규격서 참조

산출물

구분	주요활동	결과물/산출물	제출시기	언어	개수
사전조사	요구사항 정의	사전조사계획서	사전조사 2주전	국문	3부
		사전조사 결과보고서	사전조사 후 2주 이내	국문	5부
		구축일정 상세 계획서	사전조사 후 2주 이내	국문/영문	1부
		요구사항 정의서	사전조사 후 2주 이내	국문/영문	1부
	설계 및 구현 협의	첨단교실 세부 설계서	교실 설계 완료 후	국문/영문	1부
		기자재 총괄내역서	교실 설계 완료 후	국문/영문	1부
		첨단교실 시스템 구성도	교실 설계 완료 후	국문/영문	1부
		기자재 통관계획서	사전조사 후 2주 이내	국문/영문	1부
기자재 공급 및 운송	기자재 공급	기자재 선정 내역서	사전조사 후 1달 이내	국문	1부
		기자재 발주 계획서	기자재 발주 1개월 전	국문	1부
		기자재 발주 내역서	사전조사 후 2달 이내	국문/영문	1부
		기자재 포장 계획서	사전조사 후 2달 이내	국문	1부
	기자재 운송	포장명세서	사전조사 후 2달 이내	국문	1부
		수출면장	사전조사 후 2달 이내	영문	1부
		보험 및 선하증권(B/L)	사전조사 후 2달 이내	영문	1부
		수입통관용 선적서류	사전조사 후 2달 이내	영문	1부
		물품수령확인서(최종도착지)	사전조사 후 2달 이내	영문	1부
첨단교실 구축	첨단교실 리모델링	교실 리모델링 공사 계획서	사전조사 후 1달 이내	국문/영문	1부
		교실 리모델링 중간 보고서	구축 완료 전까지 주간	국문	1부
		교실 리모델링 완료 보고서	교실 리모델링 완료 후	국문/영문	1부
	기자재 설치 및 검수	기자재 설치 완료 보고서	기자재 설치 완료 후	국문/영문	1부
		검수 결과 보고서	기자재 설치 완료 후	영문	1부
		기자재 인수/인계서	기자재 설치 완료 후	영문	1부
		사용자/관리자 매뉴얼	기자재 설치 완료 후	영문	5부
	하자보수	하자보수 계획서(국·영)	구축 완료 후	국문/영문	1부
		현지유지관리계획서(국·영)	구축 완료 후	국문/영문	1부
기자재 연수 및 기술이전	현지연수, 개소식 운영지원	기자재 활용 연수 계획서	구축 완료 후	국문/영문	1부
		첨단교실 기자재 활용 연수 프로그램 및 교재	기자재활용연수 1주 전	국문/영문	3부
		첨단교실 기자재 관리방법 영상콘텐츠	기자재 활용 연수 후	국문/영문(자막)	3개
		첨단교실 시설 관리방법 매뉴얼	기자재활용 연수 후	영문	3부
	기술이전	기술이전 계획서	구축 완료 후 1주 이내	국문/영문	1부
		기술이전 결과보고서	기술이전 후 1주 이내	국문/영문	1부
사업관리	사업관리	사업수행계획서	계약체결 전	국문/영문	3부
		착수보고서	계약 후 1개월 이내	국문/영문	5부
		최종보고서(USB포함)	사업 완료일 1주 전	국문/영문	5부
		사후관리계획서(USB포함)	사업 완료일 1주 전	국문/영문	3부

	Ⅲ		제안요청내용

1		첨단교실 공사

리모델링 공사

▣ 현지 제반 환경에 적합하고 합리적으로 설계가 구성되어야 하며 시설수요를 고려한
미래지향적 첨단 시설로 설계되어야 함

▣ 학습공간은 첨단교실에서 강의식 학습과 모둠학습을 위한 가구배치(책상, 의자 등)가
모두 가능하도록 구성되어야 하며, 학생들의 동선을 고려한 인테리어 설계가 되어야함

▣ 계절 및 외기온도의 변화에 대한 건물의 영향을 최소화하는 에너지 절약형 및 탄소
중립을 지원하는 설계 방식이 고려되어야 함

▣ 교실 인테리어 작업 시 양국 협력 및 한국적 이미지가 반영된 디자인요소가 가미되어야 함

▣ 본 사업을 낙찰받은 사업자가 직접 공사하는 것을 기본으로 하나, 해외사업의 특성상
계약 후 현지 실내건축공사 사업자와 하도급 계약을 체결하여 공사를 진행할 수 있음. 단, 건설산업 기본법령, 하도급 거래 공정화에 관한 법령 및 해당 국가의 관련 법령에 따라 계약 및 대금 지급을 하여야 하며, 이를 충실히 이행하지 않을 경우, 관계 법령에 따라 행정제재와 부정당업자로 입찰참가 자격 제한 처분을 받게 됨

▣ 제안사는 공사계획 수립 시 협력국 학교 현장의 의사를 적극 반영하여야 하며, 협의 결과 세부 공사내용의 변경이 필요할 경우 수요기관과 협의하여 과업 내에서 진행할 수 있음

▣ 제작 가구 및 장비는 제작 전과 후에 충분한 검수를 통하여 제작하여야 하며, 리스크
최소화 방안을 강구하여 계획에 반영되어야 함

▣ 첨단교실 리모델링 공사는 첨단교실의 개소식 및 포럼 일정에 맞추어 완공하는 것을
원칙으로 하며, 운송과 통관 등 기자재 수급 문제가 발생할 경우 수요기관과 협의하여 일정을 조정할 수 있음

▣ 제안사는 리모델링 공사 진행시 발생할 수 있는 다양한 변수에 대한 리스크 관리를
해야 하며, 공사 중 인적, 물적 사고 방지를 위해 최대한 노력해야 함

▣ 리모델링 공사 진행사항에 대해서는 공사 항목별 진행사항과 경과를 주기적으로
수요기관에 보고하여야 하며, 특이사항은 사전/사후 보고를 통해 첨단교실 구축 프로젝트 전체 일정에 영향을 최소화하도록 하여야 함

가구 및 첨단교실 기자재 설치공사

▣ 자원절약 및 재활용에 기여할 수 있는 환경친화적인 자재를 가급적 사용하여야 함

▣ 첨단교실 가구 배치는 학생 및 교사의 동선을 고려하여 배치하여야 하며, 다양한
교수 학습방법의 활용을 위한 모둠학습 및 협력학습이 가능한 가구배치를 하여야 함

▣ 학습효과를 극대화하기 위하여 교사와 학생들의 거리, 소음 및 일조량 등을 고려하여 가구 및 기자재 설치를 진행하여야 함

▣ 가구 및 첨단교실 기자재는 고정항목과 이동 가능한 항목을 선정하여 최종 산출물에 기재하여야 함

2		첨단교실 ICT 활용 기자재 공급

기자재 공급 설치 일반

▣ 조달대상 물자는 지시된 사양 또는 규격의 동등 이상 장비로서 국내외 공인기관의
품질 인증(KS, Q, ISO, CE, UL 등 마크)을 획득한 제품, 국내외 전문 제조업체가 품질을 보증하는 우수한 제품을 구입하여 지원하는 것을 원칙으로 함

▣ 제안요청서에 제시된 사양에서 기능 향상이 있는 경우 사업 예산 총액 범위내에서
최신사양을 반영 하여야 함

▣ 현지구매 가능 품목에 대해서는 현지구매 가능하나, 면세 적용이 불가할 경우 그에
따른 비용 부담은 제안사에 있음

▣ 장비는 현지에서 직접 유지관리(장애 발생 시 대처 및 소모품 구매 등)가 가능한
제품으로 선정하여야 함. (검수에서 통과하여도 현지에서 사용 및 작동이 불가할
시 하자보수 이행책임 발생)

▣ 제공되는 장비는 정품을 원칙으로 하며, 변경이 필요할 경우 주관기관의 승인을 받아야 함

▣ 기자재 구성품은 시스템 구축 후 안정적인 운용 및 유지관리를 위해 Global Warranty
지원 제품 구성을 원칙으로 하며, 기자재 수급 및 사업 추진환경에 따라 주관기관과
협의하여 변경할 수 있음

▣ 기자재 세부내역 및 구성 기준은 최소한의 요구사항으로, 제안사가 더 우수한 구성 방안이 있을 경우, 동급이상의 대체 장비와 대체 사유를 명시하고, 품질을 보증할 수 있는 상세사양을 제시하여야 함

▣ 장비 일체의 제품별 사용자 매뉴얼(설치 매뉴얼 포함)은 영어나 현지어로 제공할 수
있어야 함

▣ 모든 공급 장비의 전원은 현지 전원에 일치하여야 함

▣ 성능, 신뢰성 및 확장성이 높고 현지 사용 가능한 기자재를 제공하여야 하며 안정성이
확인된 인증제품을 사용하여야 함

▣ 장비는 표준 기술 및 정품 사용을 준수하고 영문 또는 현지어 처리에 문제가 없는 제품을
지원하며, 향후 기기 단종 또는 업그레이드를 고려하여 장비 도입계획을 수립하여야 함

▣ 모든 장비는 선적 전 1회, 설치 완료 후 1회 포함 총 2회 시험하여 이상이 없을 시
최종 검수 완료됨

▣ 제조사의 부도 및 제품의 단종으로 인한 공급 불가 시 수요기관의 사전승인 후 동등한
사양의 제품 또는 상위제품으로 변경하여 납품하도록 하되 금액은 조정 불가함

▣ 품질상의 이유로 협력국/사용자의 이의제기 및 제품교환 요구가 있을 경우 이에 응하여야 함

▣ 사양 해석이 필요한 경우, 사양에 표시되지 않는 사항, 기타 경미한 사항 등에 대해서는
수요기관의 의견에 따름

▣ 제안서 상에 납품이 가능한 장비의 품명, 대표규격, 제조국, 제조사, 제품번호, 단위 및
수량을 전부 기재하여야 함

물품운송·검수·통관·설치·품질관리 계획

▣ 국내납품장소 : 수요기관이 지정하는 장소로 국내검수 후 포장 및 운송이 가능하며,
교통접근이 용이한 장소

▣ 포장방법 : 종이박스(Carton BOX) 포장 / 검수완료 후 운송업체에서 우든 포장
(방진, 방수, 무진동 포장 감안)

▣ 계약업체는 수요기관에서 지정하는 한국 내의 지정 장소(검수장소) 까지 공급물품을
운송하여야 하며, 이에 수반되는 운송료를 부담하여야 함

▣ 모든 장비는 선적 전 1회 이상 반드시 검수를 완료하여야 함

▣ 수출·수입 통관 절차 진행에 필요한 서류 및 관련 증빙을 사전에 제공하고, 국가별 통관
절차 계획을 철저히 수립해야 함

▣ 운송진행 현황(도착 항구/공항, 도착 예정일)에 대하여 상시 보고하여야 함

▣ 현지 구축 후 공여국(수요기관)과 협력국 관계자 입회하에 최종검수를 완료해야 함

품질보증 및 하자보수

▣ 장비의 고장 발생 시 현지 수리 또는 부품 교체 등의 방법으로 고장이 조기에 처리될
수 있도록 유지 보수 계획을 수립해야 함

▣ 공여 물품의 품질보증기간은 검수일로부터 2년간(운영체제의 경우 1년 이내)으로 함

- 동 기간 중 현지에 대리인 또는 대리점을 지정하여 장애 발생 시 수리 및 응급 대처
할 수 있는 시스템을 구축하여야 함

- 고장이 많은 부속품 등은 동 기간 중 필요한 예비수량을 충분히 확보하여 현지에
보관하여, 현지에서 응급대응이 가능하여야 함

- 계약체결 후 하자보수 계획서 제출(하자 보수내용 명세서, 장비 이상 발생 시 현지
업무처리절차, 신고접수 후 하자보수 조치기간 한도 등)

- 이 하 여 백 -

3		협력국 첨단교실 ICT활용 기자재 연수 및 사후관리 지원

협력국 교원 기자재 연수

▣ 첨단교실 구축 후 에이펙국제교육협력원 및 협력국 관계자와 협의하여 기자재 연수를
실시해야 함

▣ 기자재 연수 기간, 연수 대상, 연수 내용 등은 에이펙국제교육협력원 및 협력국 관계자와
협의하여 결정함

▣ 현지연수 이후 ①기자재 사용방법 ②기자재 네트워크 시스템 흐름도 ③장비 및 시설
관리 매뉴얼 ④유지보수방법 등에 대한 첨단교실 하드웨어 영상콘텐츠를 영어 자막 삽입 이후 제출하여야 함

▣ 기자재 연수 후 연수 대상자의 교육 효과를 데이터 기반으로 제시해야 함

사후관리 지원

▣ 사후 첨단교실의 관리 체계를 측정하기 위해 시설물 및 기자재 유지관리 매뉴얼,
하자보수 리스트를 제작하여 협력국 관계자에게 사후관리에 대한 명확한 가이드라인을 제공해야 함

- 이 하 여 백 -

	Ⅳ		제안 안내

1		계약 조건

기본방침 및 적용규정

○ 기본방침

- 공개입찰을 통하여 다수 사업자에게 참여기회를 부여

- 공정경쟁에 의한 우수 사업자 선정

○ 적용규정

- 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률, 동법 시행령 및 시행규칙

- 기획재정부 계약예규 “협상에 의한 계약 체결기준”

입찰 참가자격

○ 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제12조(경쟁입찰의 참가자격) 및「동법 시행규칙」제14조(입찰참가자격요건의 증명)에 따른 경쟁입찰 참가자격을 가진 업체

○ 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」제27조 제1항(부정당업자의 입찰 참가자격 제한 등) 및「동법 시행규칙」제76조(부정당업자의 입찰참가자격 제한기준 등)에 해당되지 아니한 업체

○ 국가종합전자조달시스템(나라장터) 입찰참가자격등록규정에 따라 입찰서 제출마감일 전일까지 나라장터에 기타자유업종(업종코드 : 9999)으로
입찰참가자격을 등록한 업체

○ 공동도급에 관한 사항 : 공동도급(공동이행방식) 허용

- 공동도급 수행 시 수행 업체별 수행범위 및 역할 등을 구체적으로
명확하게 제시하여야 함

- 공동수급 희망업체는 입찰참가 신청 시 입찰서에 공동수급협정서(공동이행방식)를 작성하여 제출하여야 함

- 공동수급체 구성원이 다른 공동수급체를 구성하여 중복적으로 입찰에
참가할 수 없으며, 낙찰자 결정 후 구성원을 변경할 수 없음

- 공동수급체 구성원이 정당한 이유 없이 계약이행에 참여하지 않을
경우 입찰참가 자격을 제한함

※ 주의사항

가. 본원 계약구매업무규칙 제8조(입찰참가 제한)에 해당하는 업체가 공동도급 또는 하도급으로 입찰 또는 승인을 요청하는 경우에는 참여를 불허하거나 그 하도급 계약을 승인하지 않을 수 있음

▪ (사)에이펙국제교육협력원 계약구매업무규칙

제8조(입찰참가 제한) ①계약책임자는 다음 각호에 해당하는 자가 있을 경우에는 지체없이 원장에게 보고하여 6개월 이상 3년 이하의 입찰참가자격을 제한할 수 있다.

1. 자격에 관한 서류 및 기타 계약에 관한 서류를 위조 또는 변조한 자

2. 계약의 이행에 있어서 고의로 조잡 또는 부당하게 하거나 부정한 행위를 한 자

3. 경쟁입찰에 있어서 입찰자간에 서로 상의하여 미리 입찰가격을 협정하거나, 특정인의 낙찰을 위하여 담합한 자 또는 고의로 입찰무효를 한 자

4. 입찰참가를 방해하거나 낙찰자의 계약체결 또는 그 이행을 방해한 자

5. 정당한 사유없이 계약을 체결 또는 이행하지 아니한 자

6. 계약의 체결 또는 그 이행과 관련하여 관계직원에게 증뢰한 자

7. IACE의 승인 없이 하도급을 시키거나 IACE의 승인을 받은 하도급 조건을 변경한 자

8. 감독 또는 검사에 있어서 그 직무수행을 방해한 자

9. 입찰참가신청 또는 입찰참가승낙을 하고도 정당한 사유 없이 계속하여 3회 이상 입찰에 참가하지 아니한 자

10. 부실시공 또는 부실설계를 한 자

11. 정부로부터 부적격 업체로 입찰참가 제한을 받은 자

②계약책임자는 제1항의 규정에 의하여 자격이 제한된 자가 상호‧대표자 변경 등의 방법으로 제한기간 내에 입찰에 참가하는 것을 방지하기 위하여 입찰참가자의 주민등록번호, 법인등록번호, 관계법령상의 면허 또는 등록번호 등을 확인하여야 한다.

나. 입찰에 참가하는 업체가 퇴직자 등 영입 현황확인서 등의 허위서류를 제출하는
경우에는 입찰 무효 또는 계약을 해제·해지 할 수 있음

계약 방법

○ 입찰방식 : 경쟁입찰

○ 낙찰자 선정방식 : 협상에 의한 계약

- 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제43조(협상에 의한 계약체결)에 의해 제안서를 평가한 후 우선협상대상자를 선정하고
협상절차를 통하여 사업자를 선정함

- 계약체결에 필요한 세부적인 사항은 「협상에 의한 계약체결기준(기획재정부계약예규)」과 관련 조달청 훈령 및 수요기관 회계규칙을 적용함

입찰의 무효

○ 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제39조(입찰서의 제출‧접수 및 입찰의 무효) 및 「동법 시행규칙」제44조(입찰무효)에 의함

입찰의 변경 및 철회

○ 수요기관은 천재지변, 국가비상사태 등 불가피한 사유로 인하여 동 용역을 정상적으로 실시할 수 없을 경우 용역시기, 인원 등을 변경하거나 동 용역을 철회할 수 있음

○ 수요기관은 제안사의 귀책사유로 인해 용역을 변경, 가격초과,
협상결렬 등의 사유 발생 시 이 입찰을 철회, 연기하거나 재공고 입찰할 수 있으며, 용역범위, 일정, 입찰조건 등을 변경하여 새로운 공고를 할 수 있음

제안요청 설명회

○ 일시/방식 : ‵21. 08. 13.(금) 10:00 ∼ 11:00(60분간) / 화상회의 방식

※ 제안요청 설명회 참여 여부는 업체선정 과정에 영향을 주지 않음

※ 제안요청 설명회 관련 상세내역은 별첨문서 참조

기타사항

○ 다음의 사유가 발생한 경우 과업수행상 특별한 사유가 없는 한 계약 위반 행위로 간주하여 관계규정에 의거 조치할 수 있음

- 수요기관의 정당한 지시에 불응하여 과업을 진행한 때

- 수행업체가 과업수행이 불가능하다고 인정할 때

- 기타 계약조건을 위반한 때

○ 다음의 사유가 발생하였을 경우에는 수요기관과 사전 협의하여 과업기간을 조정할 수 있음

- 과업수행 중 수요기관의 사정상 계획의 변경‧조정 사유가 발생한 경우

- 불가항력적인 사유가 발생한 경우

※ 코로나19 등 전염병의 세계적 유행으로 인하여 일정 및 사업기간이 변경될 수 있음

- 이 하 여 백 -

2		제안서 작성 및 제출

제안내용

○ 제안서는 아래 목차를 준수하여 각 항목에 대해 누락 없이 작성

작 성 항 목			작 성 방 법	비 고
Ⅰ.	제안사 일반현황
1. 일반현황			ㆍ제안사의 일반현황 및 주요연혁, 재무현황(최근 3년간의 자본금 및 부문별 매출액을 명료하게 제시) ㆍ신용정보제공업자가 제공하는 입찰공고일 이전 가장 최근에 평가한 유효기간 내 회사채(또는 기업어음)에 대한 신용평가등급 제시
2. 조직 및 인원			ㆍ제안사(컨소시엄 포함)의 조직 및 인원현황 제시
3. 주요 사업내용			ㆍ제안사의 주요사업 내용을 분야별로 구분하여 제시
4. 기술현황			ㆍICT 교육 관련 보유 기술/솔루션/제품 기재 ㆍ특허, 인증, 수상현황 및 연구개발 현황
5. 실적			ㆍ최근 3년간 해당사업 관련 실적을 하단 양식에 의해 작성하며, 각각의 실적증명원 제출
Ⅱ.	사업일반 및 전문성
1. 제안범위 및 전제조건			ㆍ본 사업의 제안요청 내용을 명확하게 이해하고 본 제안의 범위 및 전제조건을 명확하게 기술
2. 사업추진전략			ㆍ본 사업을 성공적으로 수행하기 위한 사업추진전략을 제안사의 특징 및 장점을 중심으로 기술
3. 수행조직 및 업무분장			ㆍ본 사업을 수행할 조직 및 업무분장 내용을 상세하게 제시(단계별, 역할별)
4. 추진일정계획			ㆍ단계별 추진일정을 상세히 제시 (제출할 산출물의 종류, 제출시기 등 )
Ⅲ.		교류협력국 첨단교실 구축
1. 2021년 신규 교류협력국 첨단교실 구축			ㆍ제안요청서 “목차 Ⅱ, Ⅲ”의 내용 참조하여 교류협력국의 첨단교실 구축대상 및 용역범위와 세부요구사항을 충족하는 구축방안을 제시
2. 협력국 지속가능성을 고려한 교실디자인			ㆍ협력국 환경과 모델에 적합한 첨단교실 디자인을 교수학습모델과 학생 동선을 고려하여 제시
Ⅳ.	지원 부문
1. 품질 관리 및 유지 보수 계획			ㆍ제안사의 품질관리체계를 기술(CMM, ISO 등) ㆍ본 사업에 대한 품질관리 조직/인원 ㆍ품질관리 전략을 위험관리, 장애관리 등 세분하여 기술 ㆍ무상하자보수, 장애처리절차, 유/무상 유지보수체계 및 계획 등의 유지보수를 위한 종합적인 방안 제시
2. 교육 및 기술이전 계획			ㆍ교육연수 및 기술이전의 범위 및 일정 제시
Ⅴ.	사업지속가능성/성과관리
1. 첨단교실 교수학습 모델 설계방안			ㆍ현지 구축하는 첨단교실에서 지속가능성 및 기대효과를 고려한 교수학습 모델 설계방안을 제시
2. 사업의 지속가능성 및 성과제고 방안			ㆍ사업 활성화 방안 수립 등 사업의 지속가능성 유지, 기술지원 방안, 시설 안정화 방안 및 후속사업 연계를 통해 성과 제고 방안을 구체적으로 제시
3. 성과 제고를 위한 특수 제안사항			ㆍ본 사업의 성과를 제고하기 위한 제안요청 내용의 개선사항 또는 위 항목에서 제시되지 않은 기타 제안사항을 제시
Ⅵ.		첨부
1. 첨부서류			ㆍ각종 증빙서류 등

※ 작성 방법에 따라 작성하되 항목별 해당내용이 없는 경우 “해당사항 없음”으로 간략히 기술하여 전체 목차는 유지함

※ 수요기관이 요청한 사항 이외에 제안사가 중요하다고 생각되는 목차 및 내용이 있을 때 이를 별도로 표기하고 기술할 수 있음

제안서 작성지침

○ 제안서는 한글(HWP)*을 이용하여 A4 크기(세로)**로 작성

*  제안사의 편의에 따라 한글(HWP) 및 MS Office 프로그램(WORD, POWERPOINT) 등 이용가능

** 제안서는 종 방향 작성을 원칙으로 하되, 부득이한 경우 횡 방향 또는 기타
용지를 일부 사용할 수 있음

○ 제안서는 원본과 요약본으로 작성하여야 하고, 제안서 앞쪽에 제안서 내용을 요약한 요약본은 30페이지 이내, 제안서는 제한 없으나 가급적 150페이지 이내로 작성

○ 제안서의 각 페이지는 쉽게 참조할 수 있도록 페이지 하단 중앙에 일련번호를 붙이되, 각 장별로 번호를 부여

○ 제안서는 제안요청 내용을 명확하게 이해하고 ‘제안요청서’를
참조하여 관련사항을 구체적으로 기술

- 제안서는 제안요청서에서 요구하는 모든 사항이 기술되어야 하며, 향상된 내용으로 제안 가능

- 본 제안요청서에 예시되지 아니한 사항이라도 본 과업 수행에 필요하다고 인정되는 항목 및 내용 등을 추가하여 자유롭게 제안가능

- 제안서의 내용을 객관적으로 입증할 수 있는 관련 자료는 제안서의 별첨으로 제출

- 제안사가 해당사항이 없는 경우에는 제안서 작성 항목 목차는 그대로 유지하고, 내용작성 부분에 ‘해당사항 없음’으로 기술

○ 제안서는 국문 작성이 원칙이며, 사용된 영문약어에 대해서는 약어표와 간단한 설명을 기술

- 제안서의 내용은 간결하고 명확한 용어를 사용하여 표현하여야 함. ‘~을 제공할 수도 있다’, '~사용 가능하다‘, ’~할 수 있다‘, ’~을 고려하고 있다‘ 등과 같이 모호한 표현은 제안서 평가 시 수행 불가능한 것으로 간주하며, 계량화가 가능한 것은 계량화하여야 함

○ 금액과 관련된 모든 사항은 부가가치세(VAT)를 포함 또는 영세율 적용 가능 여부를 검토하여 작성

제안서 작성시 확인사항

○ 교류협력국 별 기자재 운송 및 통관 지원 계획을 구체적으로 제시

○ 부탄, 파라과이의 교육정보화 현황을 반영하여 첨단교실
리모델링 및 구축 전략을 구체적으로 제안

- 교류협력국 별 첨단교실 리모델링 및 구성 전략 제안

- 교류협력국 별 첨단교실 개요 및 구성(컨셉), 특․장점 등 제안

- 첨단교실 창의적 교수학습활동이 가능한 공간디자인 조감도 제시

- 첨단교실 구축 내역 제안(제품/시스템 목록)

○ 첨단교실 구축 기자재 제안 기본사항

- 제안하는 기자재는 제안요청서 상의 사양을 만족하거나 상위의 사양으로 제안하여야 하며 사업의 효과를 제고할 수 있는 방안을 제시

- 납품기자재의 구성은 첨단교실 활용에 차질이 없도록 최적의 안을 제시하여야 하며, 기자재 간 성공적인 연계를 위한 대책을 제시해야 함

- 노트북의 운영체제는 현지어를 지원할 수 있도록 세팅하여 납품되도록 제시하고, 키보드는 영어 또는 현지어를 지원하는 제품으로 제안

○ 협력국별 첨단교실 유지‧보수 및 운영 지원 방안을 구체적으로 제시

- 납품 물품 유지‧보수 방안에 대한 구체적으로 제시

※ 구축 종료 후 유지‧보수 기간 내 안정화 시점까지의 인력지원 등 포함

- 관련 현지 전담조직 및 인력 방안, 추가 지원 사항 등

○ 첨단교실 구축 후 포럼 및 개소식 지원 방안을 구체적으로 제시

○ 교류 협력국별 첨단교실 구축 전체 및 구매, 설치, 검사 등 개별과정에 대한 사업 추진 전략 및 제안 사업자의 장점 제시

○ 제안사가 하도급 업체를 활용하는 경우에는 제안서에 기재하여야 하며 계약 후 하도급 업체 활용에 대하여 주관기관의 승인을 득하여야 함

○ 제안서 작성은 현실성 있고, 미래지향적이며, 구체적이어야 함

○ 제안서에 적용된 사항은 입찰 공고일을 기준일로 함

제안서 제출

○ 제출기한 : 2021. 08. 23.(월) 14:00 까지 [우편접수] 또는 [직접제출]

※ 우편접수는 입찰서 제출마감일 까지 발주기관에 도착된 것에 한하여 인정하며, 운송 중의 분실, 훼손 또는 지연에 대하여 발주기관은 책임을 지지 아니함
(우편 접수시 반드시 유선으로 접수여부 통보)

※ 직접 제출의 경우 하기 명기된 제출 장소로 직접 제출된 건에 한함

○ 제출장소 : 우) 41062 대구광역시 동구 첨단로 80, 교육부 중앙교육연수원 배움관 310호 (사)에이펙국제교육협력원
경영지원팀 권명근 연구원(053-719-2959)

○ 제출서류

1) 사업참가신청서 1부 (제안사 명의 공문양식 활용)

2) 가격입찰서 1부 (서식1, 반드시 별도 봉인)

3) 요약서 및 제안서 각 10부(링 또는 무선 제본) 및 해당 내용을
포함한 저장매체 2부(USB 활용)

4) 발표자료 10부(PPT 양식, 컬러 인쇄) 및 해당 내용을 포함한
저장매체 2부(USB 활용)

5) 제안요청서 「제출서류 편철 순서」를 참조하여 서식1∼10 각 1부

6) 제안요청서 「제출서류 편철 순서」를 참조하여 별첨3∼5 각 1부

7) 신용평가등급확인서 1부

8) 사업자등록증 사본(또는 고유번호증), 법인인감증명서* 각 1부

* 사용인감 사용시 사용인감계 별도 제출

9) 입찰보증보험증권 1부(입찰금액의 5/100)

▪ 보증기간

- 보증기간 초일 : 입찰서 제출마감일 이전

- 보증기간 만료일 : 입찰서 제출마감일 다음날로부터 30일 이후

10) 국세 및 지방세완납 증명서 1부

※ 제안서를 포함 본 제안 관련 제출된 모든 문서는 반환 및 공개하지 않음

○ 제출서류 편철 순서

※ 아래 “1) ∼ 6)”에 대해서 각각 별도 편철 요청, 요약서/제안서/발표자료는 10부 제출
그 외에는 각 1부 제출, 저장매체(USB)의 경우 데이터 오류를 고려하여 예비 1EA를
포함한 2EA씩 제출요청(총 2개의 USB에 “2) ~ 4) 파일”을 같이 탑재해도 무방)

1) 사업참가신청서

연번	서류종류	서식번호	수량	비고
1	사업참가신청서	-	1	제안사 명의 공문양식

2) 가격입찰서

연번	서류종류	서식번호	수량	비고
1	가격입찰서(산출내역서 포함)	서식1	1	별도 봉인, 법인 인감 날인 必

3) 요약서

연번	서류종류	서식번호	수량	비고
1	제안소개서	서식2	10	제본된 10부(USB 2EA 포함), ‘요약서’ 제일 앞장에 ‘제안소개서 위치’
2	요약서	-	10

4) 제안서

연번	서류종류	서식번호	수량	비고
1	제안서	-	10	제본된 10부(USB 2EA 포함)

5) 발표자료

연번	서류종류	서식번호	수량	비고
1	발표자료	-	10	컬러인쇄, 제본된 10부(USB 2EA 포함)

6) 기타자료

연번	서류종류	서식번호	수량	비고
1	제안사 일반현황 및 연혁	서식3	1
2	경영 실태(최근 3년)	서식4	1
3	유사분야 사업수행 실적현황(최근 3년)	서식5	1
4	사업 실적증명원	서식6	1
5	핵심투입인력 유사사업 수행실적	서식7	1
6	핵심투입인력 자격사항	서식8	1
7	핵심투입인력 이력사항	서식9	1
8	하도급 대금지급 비율 명세서	서식10	1
9	청렴계약이행서약서	별첨3	1	법인 인감 날인 必
10	보안서약서	별첨4	1	법인 인감 날인 必
11	퇴직자 등 영입현황 확인서	별첨5	1	법인 인감 날인 必
12	신용평가등급확인서	-	1	1부(입찰공고일 기준 최근 1년 이내)
13	사업자등록증, 법인인감증명서	-	1	사용인감 사용이 사용인감계
14	입찰보증보험증권	-	1	1부
15	국세 및 지방세 완납증명서	-	1	1부(입찰일 1달 이내 발행본)

○ 문의처

- 담당자 : (사)에이펙국제교육협력원 경영지원팀 권명근

- 연락처 : 053-719-2959

- E-mail : kmg8342@alcob.org

3		제안 유의사항

일반사항

○ 제안서 기재사항의 일부 또는 전부가 허위‧모방‧표절된 사실이 발견된 경우 평가대상에서 제외되며, 낙찰자로 선정된 이후라도 낙찰을 취소할 수 있음. 또한 계약 후일 경우 계약을 무효화하고 손해배상을 청구할 수 있음

○ 제출한 입찰서류 및 제안서는 반환하지 않으며, 제안과 관련된 일체의 비용은 제안사의 부담으로 함

○ 입찰 참가자는 공고일 현재 적용되는 국가계약관계법령 및 계약예규 등 입찰에 필요한 모든 사항을 숙지하고 입찰에 응해야 하며, 공고 및
제안요청서에 포함되지 않은 사항은 동 법령 및 예규 등에 따름

○ 제출자료 미비로 인한 평가 상 불이익은 제안사의 책임으로 함

제안서의 효력

○ 제안서의 내용은 과업 제안사가 선정된 후 계약서에 명시되지 않더라도 계약서와 동일한 효력을 가짐. 단, 동일한 사항에 대하여 제안서와 계약서
(또는 협상서)의 내용이 상이할 경우 계약서(협상서)의 사항이 우선하여 적용됨

- 수요기관의 정책변경이 불가피한 경우에는 본 과업의 일부 또는 전부에 대한 변경사항이 발생할 수 있음. 수요기관과 변경사항에 대한 논의 및 변경사항에 대한 성실한 수행 필요

○ 수요기관은 제안서 내용의 확인을 위하여 추가 자료를 요청할 수 있으며, 제안사는 이에 응해야 함. 이때 제출된 자료는 기 제출한 제안서와 동일한 효력을 가짐. 또한 제출된 제안서의 내용은 수요기관과 협의 없이
수정·삭제·추가 할 수 없음

○ 제안서의 내용을 충실하게 보완하기 위하여 변경이 필요하다고 판단되는 사항은 협상과정에서 수요기관과 제안사가 상호 협의하여 변경 또는 추가 가능

소유권 및 지적재산권

○ 제안사는 본 용역을 수행함에 있어 발생하는 저작권, 사용권 또는 특허 등 지적재산권의 문제에 대하여 책임을 져야 하고, 수요기관은 어떠한 책임도 지지 아니함

○ 본 사업에서 제작한 모든 물품(임대항목 제외)은 수요기관의 소유로 함

○ 과업수행을 위해 제작한 홍보물 등 일체 자료의 디자인 및 내용 등에 대한 지적재산권 및 저작권 등은 공동으로 소유하며 제3자에게 대여할 수 없음(용역계약일반조건 제35조의2)

○ 제안서 작성과정에서부터 과업수행 중 제공받은 제반정보 및 자료 등은 본 계약의 목적 외에 사용하여서는 아니되며, 발주자 또는 자료제공기관이 반환을 요구하였을 경우 즉시 이를 반환하여야 함

보안사항

○ 제안사는 본 사업과 관련해 취득한 업무 내용에 대하여 제3자에게 누설해서는 안 되며, 이를 위반하여 문제가 발생할 때는 제안사가 책임을 짐

○ 본 과업의 수행과 관련하여 수집한 모든 자료와 기타 정보는 수요기관의 사전승인 없이는 본 용역 이외의 분야에 사용하거나 타인에게 제공 또는 대여할 수 없음

○ 과업 수행 중 보안에 관계되는 사항에 대하여는 제안사는 보안 통제를 엄격히 하여야 하며 보안사항의 누설로 인하여 사회적인 물의를 야기하였을 때에는 본 과업의 제안사 또는 업체의 대표자에게 민･형사상의 책임을 물을 수 있음

○ 계약체결 시 제안사는 대표자 및 용역사업 참여자에 대하여 보안서약서, 비밀유지계약서, 개인정보처리위탁 계약서를 제출하여야 함

○ 기타 보안관련 사항에 대하여는 수요기관의 보안업무 규정에 따라야 함

준수사항

○ 제안요청서와 제안서 등에 대한 해석상의 차이가 있을 경우에는 상호 협의하되, 조정이 불가능하다고 판단될 경우에는 수요기관의 의견에 따라 해석함

○ 제안요청서에 명시되지 않은 사항이나 과업의 추가(변경)조정이 필요한 경우 양측간 협의 하에 진행하며 그에 따라 소요되는 비용 또한 상호 협의 후 진행함

○ 제안사는 모든 사항을 수요기관과 긴밀히 협의하여야 하며, 용역수행계획에 따른 진행사항을 보고(일/주/월 단위)하여야 함. 또한 진행상의 문제가 발생할 시에는 수요기관에 즉시 보고하여야 함

○ 용역 추진 과정에서 설명 요구가 있거나 기타 행사 진행과 관련하여 수요기관이 참석을 요청하는 회의에 참석하여 내용을 설명하고 수요기관의 수정‧지시사항을 성실히 이행해야 함

○ 또한 사업종료일 전에 제안요청서, 계약서 등 업무범위에 대한 사업수행 최종보고서를 제출하여야 함

○ 제안사는 과업 수행 시의 안전사고에 대비하여 사업 관계자 등의 피해를 보상으로 하는 안전보험에 가입하고, 안전관리에 철저를 기하여야 하며, 안전사고 발생 시 이에 대한 책임을 짐

	Ⅴ		제안서 평가 및 선정 안내

1		제안서 평가

평가 설명

○ 본 제안의 평가를 위해 추후 수요기관이 지정하는 장소에서 평가회 실시

- 일시‧장소 : ‵21. 08. 26.(목)* / (사)에이펙국제교육협력원 소재지

* 상세 일정은 별도 공지

- 설명 순서 : 제안서 접수 순

- 설명 방식 : 프레젠테이션 방식으로 제안내용 설명

- 설명 시간 : 발표 15분*, 질의응답 15분(설명시간은 변동 가능)

* 발표는 기업일반현황 부분을 최소화 하고, 정성평가 부분에 집중하여 진행요청

- 설명자 : 사업책임자 또는 입찰참가업체 대표(제안요청서 상 등록인)

- 참석 인원 : 총괄책임자를 포함하여 2인 이내로 제한

- 질의 답변 : 설명 후 평가위원의 질문에 대해 설명자를 포함한 참석인원이 직접 성실하게 답변

- 자료준비

․ 제안설명 자료(PT 자료 등)는 별도 작성하여 제안서 제출시 함께 제출

- 유의사항

․ 제안서평가시에는 제안서에서 지정한 사업책임자 또는 입찰참가업체대표가 발표하여야 하며, 지정된 발표자가 불참할 경우 발표 없이 제안서에 대한 서면평가로만 진행되며, 해당 상황에서 발생하는 불이익은 제안사에 있음

․ 발표는 제안서 내용을 중심으로 하여야 함

․ 타 기관 발표 청취 불가

․ 제안서 평가는 수요기관의 평가기준에 의하여 평가하며, 평가결과에 대하여 일체의 이의를 제기할 수 없음

세부 평가방법

○ 제안서 평가기관 / 평가방법 : 수요기관 자체 평가 / 기술평가+가격평가

○ 평가위원회 구성 : 각계 관련분야 전문가 8인 이상* (위원 명단 비공개)**

* 「(계약예규)협상에 의한 계약체결기준」제7조(제안서의 평가) 제 6항을 준용하여 편성

** 평가의 공정성 확보를 위하여 (계약예규)협상에 의한 계약체결기준」제7조(제안서의 평가)
제 6항을 준용하여 위원 명단 비공개

○ 종합평가점수(100점) : 기술능력평가점수(90점)*+입찰가격평가점수(10점)

* 본 사업은 교육 분야의 공적개발원조(ODA) 사업으로서, 주어진 예산을 최대한 활용하여 협력국의 교육환경 혁신 및 글로벌 지식정보격차 해소에 기여하는 것이 중요하여, 「(계약예규)협상에 의한 계약체결기준 제7조의 2항」에 따라 배점기준을 [기술평가 90% 가격평가 10% 비율]로 조정

○ 기술능력평가 : 수요기관에서 별도 평가 계획을 수립하여 평가

※ [붙임1] 제안서 평가기준 참조

※ 「조달청 협상에 의한 계약 제안평가 세부기준」제6조에 준거하여, 차등점수제/원가절감
적정성 심사/온라인 평가 방식을 미적용하는 평가의 건

○ 협상제외대상 : 기술능력 평가점수가 배점한도의 85% 미만인 제안서

○ 위에서 정하지 아니한 사항 및 낙찰자 선정 등에 관한 사항은 「협상에 의한 계약체결기준」(기획재정부 계약예규) 제7조(제안서의 평가)의 [별표] “입찰가격 평점산식”에 따라 산정

- 구체적인 입찰가격 평가방법은 조달청 규정 준용하여 수요기관에서 진행

- 이 하 여 백 -

2		선정 안내

우선협상대상자 선정

○ 기술능력평가 기준에 따라 심사한 후 「협상에 의한 계약체결기준」(기획재정부 계약예규) 제8조(협상적격자 및 협상순위의 선정)에 의거,
기술능력평가 점수가 기술능력평가분야 배점한도인 90점 만점 기준 85% 이상인 76.5점 이상인 자를 협상적격자로 선정

○ 협상의 순서는 선정된 협상적격자의 기술능력평가 점수와 입찰가격평가 점수를 합산하여 합산점수의 고득점 순에 따라 결정

○ 합산점수가 동일한 제안자가 2인 이상일 경우에는 기술능력평가점수가 높은 제안자를 선순위자로 하고, 기술능력평가점수도 동일한 경우에는 기술능력의 세부평가항목 중 배점이 큰 항목에서 높은 점수를 얻은 자를 선순위자로 함

○ 기술능력의 세부평가항목 중 배점이 큰 항목에서도 모두 동일한 경우에는 제안서 평가위원회에서 결정

협상 및 낙찰자 선정

○ 협상범위는 협상대상자가 제안한 사업내용, 이행방법, 이행일정 등 제안서로 제출된 모든 내용이며 협상을 통해 그 내용을 조정할 수 있음

○ 우선 협상대상자와 협상이 성립된 때에는 차순위 협상대상자와 협상을 실시하지 아니함

○ 우선 협상대상자와 협상이 결렬되면 우선 협상대상자와 동일한 기준과 절차에 따라 차순위 협상대상자와 협상을 실시하고, 협상이 모두 결렬되면 재공고 실시

○ 협상결과 제안서에 명시된 내용은 계약서와 동일한 효력을 가지며, 협상 시 수정‧보완‧변경된 제안내용은 계약서에 명시하지 않더라도 계약서와 동일한 효력을 가짐

※ 계약서에 명시된 경우에는 계약서의 내용을 우선함

협상결과 통보 및 계약

○ 계약은 낙찰자 선정 후「협상에 의한 계약체결 기준」(기획재정부 계약예규) 제15조(계약체결 및 이행)에 따라 10일 이내에 체결

○ 계약체결 및 이행에 관하여는 서면으로 통보한 협상결과와 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 및 「동법 시행령」,「동법 시행규칙」과 이에 근거한 계약의 일반조건, 특수조건, 입찰유의서 및 일반원칙에 따름

- 이 하 여 백 -

[붙임1] 제안서 평가기준

대항목		중항목	배점	평가요소	배점
기술 평가 점수 (90)	사업일반 및 전문성 (25점)	사업이해도 및 추진전략	10	- 사업 이해도 및 제안 범위의 적절성	5
				- 사업추진 전략의 타당성 및 우수성	5
		사업수행조직 및 투입인력	15	- 사업수행조직 및 업무분장의 적정성	5
				- 투입 인력 규모의 적정성 및 전문성	5
				- 시기 / 분야별 투입 인력계획의 적정성	5
	협력국 첨단교실구축 (30점)	물자 운송 (통관포함)	15	- 물자 운송계획의 적정성 및 전략 우수성	5
				- 물자 운송 전/후 검수 수행방안 효과성	5
				- 운송과정 위험요소별 대응전략 우수성	5
		첨단교실 구축	15	- 교실 리모델링 및 구축 전략 우수성	5
				- 기자재 공급/설치/검사 전략 완성도	5
				- 첨단교실 공간 디자인 우수성	5
	지원 부문 (20점)	품질관리 및 유지보수 계획	10	- 품질관리 전략의 우수성	5
				- 유지보수 체계 등 후속운영 방안 우수성	5
		교육 및 기술이전	10	- 기술이전 계획/연수 적절성 및 우수성	5
				- 개소식/포럼 운영 지원방안의 우수성	5
	사업 지속가능성/ 성과관리 (15점)	지속가능성 및 성과 제고 방안	15	- 첨단교실 교수학습 모델 설계 우수성	5
				- 사업의 지속가능성 제고 방안	5
				- 첨단교실 운영 성과창출 제고 방안	5
가격점수(10점)		입찰가격	10	- 평가산식*에 따라 점수부여	10
계(100점)					100

평가항목 및 배점한도(총괄)

* 조달청 가격점수 평가산식을 준용하여, 기술평가회의 직후 가격제안서를 개봉하여 산출

평가방법

○ 기술평가 기준

평가항목		배점 기준	평가요소	평점
				A	B	C	D	E
사업일반 및 전문성 (25점)	사업이해도 및 추진전략	10	- 사업 이해도 및 제안 범위의 적절성	5	4.5	4	3.5	3
			- 사업추진 전략의 타당성 및 우수성	5	4.5	4	3.5	3
	사업수행조직 및 투입인력	15	- 사업수행조직 및 업무분장의 적정성	5	4.5	4	3.5	3
			- 투입 인력 규모의 적정성 및 전문성	5	4.5	4	3.5	3
			- 시기 / 분야별 투입 인력계획의 적정성	5	4.5	4	3.5	3
협력국 첨단교실구축 (30점)	물자 운송 (통관포함)	15	- 물자 운송계획의 적정성 및 전략 우수성	5	4.5	4	3.5	3
			- 물자 운송 전/후 검수 수행방안 효과성	5	4.5	4	3.5	3
			- 운송과정 위험요소별 대응전략 우수성	5	4.5	4	3.5	3
	첨단교실 구축	15	- 교실 리모델링 및 구축 전략 우수성	5	4.5	4	3.5	3
			- 기자재 공급/설치/검사 전략 완성도	5	4.5	4	3.5	3
			- 첨단교실 공간 디자인 우수성	5	4.5	4	3.5	3
지원 부문 (20점)	품질관리 및 유지보수 계획	10	- 품질관리 전략의 우수성	5	4.5	4	3.5	3
			- 유지보수 체계 등 후속운영 방안 우수성	5	4.5	4	3.5	3
	교육 및 기술이전	10	- 기술이전 계획/연수 적절성 및 우수성	5	4.5	4	3.5	3
			- 개소식/포럼 운영 지원방안의 우수성	5	4.5	4	3.5	3
사업 지속가능성/ 성과관리 (15점)	지속가능성 및 성과 제고 방안	15	- 첨단교실 교수학습 모델 설계 우수성	5	4.5	4	3.5	3
			- 사업의 지속가능성 제고 방안	5	4.5	4	3.5	3
			- 첨단교실 운영 성과창출 제고 방안	5	4.5	4	3.5	3
합계				90 점 만점

※ 등급별 평점이 소수점 이하의 숫자가 있는 경우 소수점 다섯째자리에서 반올림 함

※ 심사위원별 합산 점수 중 최고점과 최저점을 제외한 나머지 점수들의 평균 점수로 순위 결정

※ 단, 제안사 수가 4개사 이상일 경우 「조달청 협상에 의한 계약 제안서평가 세부기준」
[별표 15]에 따라 2단계로 평가를 진행할 수 있음(기술평가회의 전 평가방법 안내)

○ 입찰가격 평가 기준표

- 구체적인 입찰가격 평가방법은 조달청 규정 준용
(기술평가회의 종료 후 가격제안서를 개봉하여 조달청 규정에 따라 산출)

[붙임2] 첨부자료(관련서식)

첨부자료(관련서식)

[서식1] 가격입찰서

[서식2] 제안소개서

[서식3] 제안사 일반현황 및 연혁

[서식4] 경영 실태(최근3년)

[서식5] 유사분야 사업수행 실적현황(최근3년)

[서식6] 사업 실적증명원

[서식7] 핵심투입인력 유사사업 수행실적

[서식8] 핵심투입인력 자격사항

[서식9] 핵심투입인력 이력사항

[서식10] 하도급 대금지급 비율 명세서

[별첨1] 청렴계약이행을 위한 입찰유의서

[별첨2] 청렴계약이행 특수조건

[별첨3] 청렴계약이행서약서

[별첨4] 보안서약서

[별첨5] 퇴직자 등 영입현황 확인서

[별첨6] 용역·물품 일괄 발주사유서

[별첨7] 사업수행지침

[서식1]

가 격 입 찰 서
공고번호		입찰일자	20 . .(*가격입찰당일)
입찰건명
입찰금액	일금 원정 ( 원) *부가세 포함
본인은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」에 의한 공사[물품구매(제조)ㆍ용역]입찰유의서에 따라 응찰하여 이 입찰이 귀 기관에 의하여 수락되면 공사[물품구매(제조)ㆍ용역]계약일반조건·계약특수조건·설계서(물품규격서) 및 현장설명사항에 따라 위의 입찰금액으로 준공(납품·용역수행)기한 내에 공사(물품·용역)를 완성(제조·납품)할 것을 확약하며 입찰서를 제출합니다. 붙임 : 산출내역서 1부 * 첨부된 공내역서 및 제안요청서를 고려하여 작성 20 년 월 일 상 호 또는 명 칭 : 주 소 : 대 표 자 성 명 : (인) 주민(법인)등록번호 :

붙임. 산출내역서

구 분 비 목		금 액	구 성 비	비 고
○ 인 건 비 소 계			%
사전조사			%
첨단교실 구축			%
운영지원 (기자재 연수/ 개소식지원)			%
○ 경 비 소 계			%
기자재구매	Dechencholing Higher Secondary School		%
	Loselling Middle Secondary School		%
	Centro Educativo Campo Verde		%
리모델링	Dechencholing Higher Secondary School		%
	Loselling Middle Secondary School		%
	Centro Educativo Campo Verde		%
운송비	부탄		%
	파라과이		%
○ 일반관리비			%
○ 합 계			100%

[서식2]

제안소개서

구분	작성 항목	작성 내용
제안사 일반현황	일반현황 / 조직 및 인원	- 재무현황(최근3년간 자본금 및 부문별 매출액) - 제안사 조직 및 인원 기술
	주요사업내용	- 제안사 주요사업내용 분야 기술
사업일반 및 전문성	제안범위 및 사업추진 전략	- 제안범위 및 전제조건 - 사업추진전략 특징 및 장점 기술
	수행조직 및 업무 분장	- 과업 수행조직 및 담당별 업무 - 과업 분야별 업무 전문성
과업세부 전략	‘21년 신규 교류협력국 첨단교실 구축·운영 지원	- 각 과업별 제안사의 수행 특·장점 요약

* 제안소개서의 목적 및 세부작성 요령 : 「제안소개서」는 제안사의 본 과업에 대한 제안내용을 일목요연하게 표현하여 평가참고자료로 삼고자 함. 이에 제안사는 첨부된 양식에 한 장으로
제안사의 항목별 핵심사항을 요약·기술하여 제출

[서식3]

제안사 일반현황 및 연혁

회 사 명		대 표 자
사 업 분 야
주 소
전 화 번 호
회사 설립 년도	년 월
해당부문종사기간	년 월 ～ 년 월 ( 년 개월)
주요연혁

* 최근 3개월 이내 사업자등록증, 등기부등본(말소사항 포함, 원본 제출) 및 시·국세 완납증명서 등
증빙서류 반드시 첨부

[서식4]

경영 실태(최근 3년)

(단위 : 천원)

구 분		M-2 년도	M-1 년도	M 년도
자 본 금
매출액	ㅇㅇ부문 ㅇㅇ부문 ㅇㅇ부문 ㅇㅇ부문
	계

연 도	M-2 년도	M-1 년도	M 년도
부채총계
자본총계
유동자산
유동부채
당기순이익
매출액
총자산
부채비율
유동비율
매출액순이익율
총자산회전율

* 국세청 홈택스에서 발급가능한 최근 3년도 표준재무제표증명 첨부

* 부채비율, 유동비율, 매출액순이익율, 총자산회전율

- 부채비율 = (부채총계/자본총계) × 100

- 유동비율 = (유동자산/유동부채) × 100

- 매출액순이익율 = (당기순이익/매출액) × 100

- 총자산회전율 = (매출액/총자산) × 100

[서식5]

유사분야 사업수행 실적현황(최근 3년)

순번	사 업 명	사업개요	계약기간	계약금액 (천원)	발주처	책임기술자	용역이행 또는 납품완료일자	비고
1
2
3
4
5
6

* 작성 예)

①“수행실적증명서”혹은“이행실적확인서”를 첨부한 사업을 기준으로 용역수행 완료일자 순으로
기재(수행 중인 사업은 제외)

② 계약금액 : 타사와 공동으로 업무를 수행한 경우 총액을 기재하되 자사의 비용만을 괄호 안에 기재

③ 사업개요 : 사업 개요를 간략히 기재(차후 유사사업 실적 여부 판단 기준)

④ 하도급계약은 발주자가 승인한 경우에 한하여 작성하고 비고란에 원도급회사를 기재

[서식6]

사업 실적증명원

신 청 인	업체명				대 표 자
	영업소재지				전화번호
	사업자번호				법인등록번호
	증명서 용도	입찰 및 제안서 심사 제출용			제 출 처
용역이행 실적내용	용 역 명
	용역개요
	계약번호	계약일자	계약기간		계약금액 (VAT 포함)	용역이행 또는 납품실적
						완료일자	지분율(%)	실적(원)
증 명 서 발급기관	위 사실을 증명함. 년 월 일
	기관명 : (인) (전화번호 : )
	주 소 :
	발급부서 :			담당자 : (전화번호 : )

* 작성 예)

① 본 수행실적증명서의 실적은 수행이 완료(기성 포함)된 실적이어야 하며, 수행 중인 실적은 제외

② 공동계약으로 이행하였을 경우 해당 지분율과 해당 이행완료실적을 기재 단, 분담이행에 의한 경우 특별한 사유가 없는 한 예산액을 기준으로 지분율을 기재

③ 민간실적의 경우 수행실적증명서 외에도 계약서, 세금계산서, 필요시 거래명세표를 첨부

④ 하도급실적은 발주처가 승인한 경우에 한하여 인정하며 하도급 승인문서를 추가로 제출하여야 함

[서식7]

핵심투입인력 유사사업 수행실적

유 사 사 업 수 행 실 적
순번	구 분	성 명	용 역 명	수행(담당)업무	투입기간	발주처	사업담당자 (연락처)	비 고
1	국내/ 국외 (대상국)
2
3
4

* 핵심투입인력 : 사업관리자(PM), 교실구축 PL

* 유사사업 : 국내외 교육정보화관련 교실 혹은 유사한 수업 공간 구축 경험

* 작성 및 증빙방법

① 입찰공고일 기준 최근 3년 이내 실적 중 해당사업 관련 유사사업 수행실적만 작성(현재 수행 중인
사업을 포함하여 기재하되, 업무중첩도 확인을 위해 기간 란에는 예상 종료일자 입력)

- 증빙서류 미제출 시 해당 기재 실적을 불인정

② 관련 실적은 아래의 방법으로 증빙

발주처		실적관리 협회유무*	제출 필요 서류	비고
소재지	구분
국내	공공기관	유	①발주처의 용역이행 실적 증명서 ②실적관리협회의 실적 증명서	①, ② 중 선택
		무	①발주처의 용역이행 실적증명서
	민간부문	유	①실적관리협회의 실적 증명서
		무	①발주처의 용역이행 실적증명서 ②계약서 및 세금계산서	①, ② 모두 제출
국외	공공기관	유	①실적관리협회의 실적 증명서
		무	①발주처의 용역이행 실적 증명서	공증 필수**
	민간부문	유	①실적관리협회의 실적 증명서
		무	①발주처의 용역이행 실적증명서 ②계약서 및 세금계산서	①, ② 모두 제출 공증 필수**

* 해당 특별법에 근거한 국내 실적관리협회 (예: 건설기술, 소프트웨어, 엔지니어링 분야 관련
협회*)가 체계적으로 실적 증명을 시행 중인 경우에 한해 인정

** 공증방법 : 아포스티유 확인 또는 주재국 공문서 영사확인을 받아 제출, 문서가 영문이 아닌
경우 국문번역 공증 후 제출

③ 각 실적증명서는 유사사업 수행실적 기재 순번과 동일한 번호 견출지 부착

▶ 에이펙국제교육협력원 실적의 경우, 상기 실적에는 기재하되 증빙서류 제출은 불요

▶ 상기 제출실적이 유사사업의 정의에 해당하는지 여부는 교육정보원이 판단함.

▶ 한국소프트웨어산업협회 발행 SW기술자 경력증명서 또는 경력을 증빙할 수 있는 서류  별첨에 포함하여 제출(해당인력의 경우)

[서식8]

핵심투입인력 자격사항

구분	성명	연령 (세)	전문가 등급	본사업 참여직위	최종 학력	자격증	담당 업무	소속 기관
사업관리자 (PM)
부문
부문
부문
부문
부문
부문
부문
부문
부문
부문
부문
부문
부문

* 작성기준일자 : 제안일 현재

[서식9]

핵심투입인력 이력사항

년   월  일 현재

성 명	(국문)				생년월일				사 진
	(영문)
	(한문)
소 속
연락처	(직장) (핸드폰)
이메일
학 력	학 과 (전 공)					논 문 명
	학사
	석사
	박사
직장경력	회 사 명 (기 관 명)			근 무 기 간				직 위	담 당 업 무
자 격 증	자 격 증 명			취 득 년 월 일					발 행 기 관
외 국 어	구 분		읽 기	쓰 기			말 하 기		A : Native speaker와 같이 자유로운 구사 (통역자격 수준) B : 일상생활은 물론 전문적 내용에 대해서도 구사가능 C : 일상생활에 지장 없음 D : 사전이 있으면 의사소통가능

유사사업 수행경험	국내	사 업 명			대 상 국	분 야		기 간	발주자명	담당업무
	국외	사 업 명			대 상 국	분 야		기 간	발주자명	담당업무
기타 해외근무 경력 또는 ODA관련 교육		업 무 명 (과정명)	국 명	기 간			담 담 업 무 (교육내용)
참고사항		※ 작성 및 증빙방법 ① 업무중첩도 확인을 위해 현재 수행 중인 과업을 포함하여 기재하되, 이 경우 ‘기간’ 란에는 예상 종료일자 기재 요망 - 단, 개찰일 기준, 핵심투입인력의 해당 과업의 잔여기간 3개월 이상인 경우 감점 처리 ② 제안요청서 목차 “I. 4. 나. 전문가 파견” 항목 중에서 동 이력서 양식으로 상세히 기재할 필요가 없는 인력이 있다고 판단되는 경우, 이 인력에 대해서는 요약사항을 기재 ③ 직장경력증빙서류(건강보험득실확인서 또는 관련 협회 및 소프트웨어 기술경력 증명서 등)는 핵심투입인력 전체에 대해 별첨 ※ 개인정보 보호를 위해 주민등록번호 뒷번호는 모자이크 또는 별표 처리 요망

[서식10]

하도급 대금지급 비율 명세서

원도급자				하도급자
사 업 명				하 도 급 사 업 명
회 사 명				회 사 명
사업기간				하 도 급 기 간
				하도급 지급대금		원
하도급 지급 대금 세부내역	구분	기술 등급	①SW 월 노임단가	②투입인력 (M/M)	③M/M당 하도급 대가		④지급금액 (②x③)	⑤지급비율
	M/M	기술사
		특급기술자
		고급기술자
		중급기술자
		초급기술자
		합 계
상기와 같이 합의하였음을 확인합니다. 년 월 일 (원도급자) 직인 (하도급자) 직인
첨부서류 : 하도급 부문 산출 내역서

[별첨 1]

청렴계약이행을 위한 입찰유의서

제1조 (목적) 이 청렴계약이행을 위한 입찰유의서는 (사)에이펙국제교육협력원(이하 “협력원”이라 한다)의 청렴계약제 시행을 위하여 협력원에서 집행하는 물품구매(제조)․용역․공사 등의 각 입찰유의서 외에 입찰에 참가하는 자가 특별히 유의할 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조 (입찰참가업체의 청렴계약이행서약서 제출) 입찰에 참여하는 모든 업체는 협력원과의 상호신뢰를 바탕으로 입찰․계약체결․계약이행 과정에서의 담합 등 불공정행위나 관계직원에게 금품․향응 등 부당한 이익을 제공하지 않고, 이를 위반할 경우 입찰참가자격 제한, 계약해제 등을 감수하겠다는 "청렴계약이행서약서"를 제출한 것으로 간주하고, 계약상대자는 계약 체결시 소정서식에 따라  “청렴계약이행서약서”를 협력원에 제출하여야 한다.

제3조 (협력원의 청렴계약이행서약서 교부 등) ① 협력원 계약담당은 “청렴계약이행서약서”를 작성하여 계약상대방에게 교부하고, 협력원 계약실무자는 별도의 “청렴계약이행서약서”를 작성․보관하여야 한다.

② 협력원 사업주관부서 관계자는 과업 착수시까지 “청렴계약이행서약서”를 작성하여 계약상대방에게 교부하여야 한다.

제4조 (부정당업자의 입찰참가자격 제한) ① 입찰에 참가하는 자가 입찰가격이나 특정인의 낙찰을 위하여 담합 등의 불공정 행위를 하였을 때에는 다음 각 호의 1에서 정하는 바에 따라 입찰참가제한을 받게 된다.

1. 경쟁입찰에 있어서 특정인의 낙찰을 위하여 담합을 주도한 자는 협력원에서 발주하는 입찰의 입찰참가자격 제한 처분을 받은 날부터 2년 동안 참가하지 못한다.

2. 경쟁입찰에 있어서 입찰가격을 서로 상의하여 미리 입찰가격 협정을 주도하거나 특정인의 낙찰을 위하여 담합한 자는 협력원에서 발주하는 입찰참가자격 제한 처분을 받은 날부터 1년 동안 참가하지 못한다.

② 입찰담합 등 불공정행위를 한 경우에는 제1항과 병행하여 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 및 동법 시행령 등에 따라 공정거래위원회에 고발하는 등의 조치를 하는데 일체 이의를 제기하지 않는다.

③ 입찰․계약체결 및 계약이행 과정에서 관계직원에게 직․간접적으로 금품․향응 등의 뇌물이나 부당한 이익을 제공할 수 없으며, 이를 위반하였을 때에는 다음 각 호의 1에서 정하는 바에 따라 입찰참가제한을 받게 된다.

1. 입찰․계약체결 및 계약이행 과정에서 관계직원에게 뇌물을 제공함으로써 입찰을 유리하게 하여 계약이 체결되었거나, 시공 중 편의를 제공 받아 부실 시공한 자는 협력원으로부터 입찰참가자격 제한 처분을 받은 날부터 2년 동안 입찰에 참가하지 못한다.

2. 입찰 및 계약조건이 입찰자 및 낙찰자에게 유리하게 되도록 하거나, 계약이행을 부실하게 할 목적으로 관계직원에게 뇌물을 제공한 자는 협력원으로부터 입찰참가자격 제한 처분을 받은 날부터 1년 동안 입찰에 참가하지 못한다.

④ 제1항 내지 제3항의 규정에 의하여 입찰참가자격을 제한하는 정복개발원의 처분과 관련하여 입찰에 참가하는 업체는 협력원을 상대로 손해배상을 청구하거나 배제하는 입찰에 관하여 민․형사상 이의를 제기하지 아니한다.

제5조 (계약해지 등)  입찰, 계약체결 및 계약이행과 관련하여 관계직원에게 뇌물을 제공한 자는 다음 각 호의 1에서 정하는 바에 따라 처분을 받게 된다.

1. 계약체결 전에는 적격자․낙찰자 결정대상에서 제외하고, 낙찰자가 결정된 경우에는 그 결정을 취소한다.

2. 계약체결 이후부터 착공(착수)전까지는 당해 계약을 해제한다. 다만, 수요기관의 사업수행 상 부득이 한 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

3. 계약이행 이후에는 계약의 전부 또는 일부를 해제 또는 해지한다. 다만, 계약대상물의 성격․진도․규모․이행기간 등을 감안하여 부득이한 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

4. 계약상대자는 제1호 내지 제3호의 처리에 대하여 민․형사상 일체 이의를 제기하지 않는다.

제6조 (기타사항)  ① 입찰에 참가하는 업체의 임․직원(하도급업체 포함)과 대리인이 협력원 관계직원에게 금품, 향응 등을 제공하거나 담합 등 불공정 행위를 하지 않도록 하는 해당업체 윤리강령을 실천하여야 하고, 내부비리 제보자에 대하여도 일체의 불이익 처분을 하지 않아야 한다.

② 본건 관련 하도급계약 체결 및 이행에 있어서 하도급자로부터 금품을 수수하거나 부당 또는 불공정한 행위를 하지 아니 하여야 한다.

③ 전자계약체결시에 제2조 및 제3조 제1항에 의한 청렴계약이행서약서를 첨부할 경우에는 동 서류를 작성․날인하여 상호 교부, 보관한 것으로 간주한다.

[별첨 2]

청렴계약이행 특수조건

제1조(목적) 이 청렴계약이행특수조건은 (사)에이펙국제교육협력원(이하 “협력원”이라 함)과 계약상대자가 체결하는 물품구매(제조)․용역․공사 등 계약에 있어 계약일반조건 외에 청렴계약을 위한 내용을 특별히 규정함을 목적으로 한다.

제2조(청렴계약이행 준수의무) ① 물품구매(제조)․용역․공사 등의 입찰에서 청렴계약이행서약서를 제출하고 계약체결하거나 계약체결 할 상대자는 계약체결 및 이행과 관련하여 어떠한 명분으로도 관계직원에게 직․간접적으로 금품․향응 등의 부당한 이익을 제공하여서는 아니 된다.

② 우리원에서 시행하는 모든 사업에 투입되는 계약상대자(하도급업체 포함)의 임․직원과 대리인이 직무와 관련하여 금품․향응 등 부당한 이익을 제공하거나 제공받는 경우 우리원은 계약상대자에게 이들의 교체를 요구할 수 있다.

③ 계약상대자(하도급업체 포함)의 임․직원과 대리인이 금품․향응 등 부당한 이익을 제공하거나 제공받아 당연퇴직, 파면 또는 해임, 교체된 경우에는 퇴직일로부터 2년간 우리원이 시행하는 사업에 참여할 수 없다.

제3조(부정당업자의 입찰참가자격 제한) ① 입찰에 참가하는 자가 입찰가격이나 특정인의 낙찰을 위하여 담합 등 불공정 행위를 하였을 때에는 다음 각 호의 1에서 정하는 바에 의하여 협력원에서 시행하는 입찰에 참가 제한을 받게 된다.

1. 경쟁입찰에 있어서 특정인의 낙찰을 위하여 담합을 주도한 자는 협력원에서 발주하는 입찰에 입찰참가자격 제한 처분을 받은 날부터 2년동안 참가하지 못한다.

2. 경쟁입찰에 있어서 입찰가격을 서로 상의하여 미리 입찰가격협정을 주도하거나 특정인의 낙찰을 위하여 담합한 경우에는 협력원에서 발주하는 입찰에 입찰참가자격 제한처분을 받은 날부터 1년동안 참가하지 못한다.

② 입찰담합 등 불공정행위를 한 경우에는 제1항과 병행하여 독점규제 및 공정거래에 관한 법령에 따라 공정거래위원회에 고발하는 등의 조치를 하는데 일체 이의를 제기하지 않는다.

③ 입찰․계약체결 및 계약이행 과정에서 관계직원에게 직․간접적으로 금품, 향응 등의 부당한 이익을 제공하지 않으며 이를 위반하였을 때에는 다음 각 호의 1에 해당하는 기간 동안 협력원에서 시행하는 입찰에 참가제한을 받게 된다.

1. 입찰․계약체결 및 계약이행 과정에서 관계직원에게 뇌물을 제공함으로써 입찰을 유리하게 하여 계약이 체결되거나, 시공 중 편의를 받아 부실 시공한 자는 협력원에서 발주하는 입찰에 입찰참가자격 제한 처분을 받은 날부터 2년 동안 참가하지 못한다.

2. 입찰 및 계약조건이 입찰자 및 낙찰자에게 유리하게 되도록 하거나, 계약이행을 부실하게 할 목적으로 관계직원에게 뇌물을 제공한 자는 협력원에서 발주하는 입찰에 입찰참가자격 제한 처분을 받은 날부터 1년 동안 참가하지 못한다.

④ 제1항 내지 제3항의 규정에 의하여 입찰참가자격을 제한하는 협력원의 처분을 받은 자는 협력원을 상대로 손해배상을 청구하거나 배제하는 입찰에 관하여 민․형사상 이의를 제기하지 않는다.

제4조(계약해지 등) ① 입찰, 수의시담, 계약체결 및 계약이행과 관련하여 관계직원에게 금품, 향응 등을 제공한 자는 다음 각 호의 1에서 정하는 바에 의하여 당해 계약에 대한 조치를 받는다.

1. 계약체결 이후 착공전의 경우에는 당해 계약을 해제한다. 다만, 수요기관의 사업수행 상 부득이 한 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

2. 계약체결 이후에는 계약의 전부 또는 일부를 해제 또는 해지한다. 다만, 계약대상물의 성격, 진도, 규모, 이행기간 등을 감안하여 부득이 한 경우에는 그러하지 아니할 수 있다

3. 계약상대자는 제1호 내지 제2호의 규정에 의한 협력원의 처분에 대하여 민․형사상 일체 이의를 제기하지 않는다.

제5조(기타사항) ① 계약상대업체의 임․직원(하도급업체 포함)과 대리인이 협력원 관계직원에게 뇌물을 제공하거나 담합 등 불공정행위를 하지 않도록 하는 업체윤리강령의 실천과 내부비리 제보자에 대하여도 일체의 불이익 처분을 하지 않는다.

② 본 건 관련 하도급계약체결 및 이행에 있어서 하도급자로부터 금품을 수수하거나 부당 또는 불공정한 행위를 하지 아니한다.

- 이 하 여 백 -

[별첨 3]

청렴계약이행서약서

당사는 부패 없는 투명한 기업경영과 공정한 행정이 사회발전과 국가 경쟁력에 중요한 관건이 됨을 깊이 인식하며「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」제5조의2에 따라 본 입찰에 참여한 당사 대리인과 임직원은 입찰․낙찰, 계약체결 또는 계약이행 등의 과정(준공․납품 이후를 포함)에서 아래 각 호의 청렴계약 조건을 준수할 것이며, 이를 위반했을 경우 입찰·낙찰이 취소되거나 계약이 해제 또는 해지 될 수 있으며, 이와 관련하여 민․형사상 소송이나 그 밖의 어떠한 이의도 제기하지 않을 것을 서약합니다.

1. 관계자에게 금품·향응 등(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함)을 요구 또는 약속하거나 수수(授受)하지 않겠습니다.

2. 입찰가격의 사전 협의 또는 특정인의 낙찰을 위한 담합 등 공정한 경쟁을 방해하는 행위를 하지 않겠습니다.

3. 공정한 직무수행을 방해하는 알선․청탁을 통하여 입찰 또는 계약과 관련된 특정 정보의 제공을 요구하거나 받는 행위를 하지 않겠습니다.

[신고대상]

∘ 관계직원에게 직∙간접적인 금품 및 향응  등(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함)행위

∘ 특정인의 낙찰을 위한 부정담합 등 입찰의 자유경쟁을 저해하는 불공정한 행위

∘ 부당한 업무지시, 알선∙청탁 행위 등 공정한 사업추진에 방해되는 행위

[신고방법]

∘ (사)에이펙국제교육협력원 경영지원팀 접수 : (사)에이펙국제교육협력원 경영지원팀 소진선 팀장
Tel. 053-719-2954 / Mail. sogood@alcob.org

※ 신고자의 경우 신고를 이유로 불이익이나 차별을 받지 않습니다.

※ (권익위 신고센터) 부패‧공익침해신고 ☎1398 / 복지‧보조금 부정신고센터 ☎110

2021 년   월    일

서약자	상 호 :
	주 소 :
	대 표 자 :		(인)
(사)에이펙국제교육협력원 이사장 귀하

[별첨 4]

보 안 서 약 서

본인은     년   월   일부로                관련 용역사업(업무)을 수행함에 있어 다음사항을 준수할 것을 엄숙히 서약합니다.

1. 본인은                관련 업무 중 알게 될 일체의 내용이 직무상 기밀 사항임을 인정한다.

2. 본인은 이 기밀을 누설함이 수요기관의 위해가 될 수 있음을 인식하여 업무수행 중 취득한 제반 기밀사항을 일체 누설하거나 공개하지 아니한다.

3. 본인이 이 기밀을 누설하거나 관계 규정을 위반한 때에는 관련 법령 및 계약에 따라 어떠한 처벌 및 불이익도 감수한다.

4. 본인은 하도급업체를 통한 사업 수행시 하도급업체로 인해 발생하는 위반사항에 대하여 모든 책임을 부담한다.

2021 년   월    일

서약자	상 호 :
	주 소 :
	대 표 자 :		(인)
(사)에이펙국제교육협력원 이사장 귀하

[별첨 5]

퇴직자 등 영입현황 확인서

■ 입찰건명 :

1. 상기 입찰(계약)건과 관련하여 당사는 에이펙국제교육협력원의 직원 또는 퇴직자※의 영입‧근무현황을 아래와 같이 제출합니다.

연번	소속	성명	직위(직급)	임용일	비고

※ 퇴직전 3년 내 에이펙국제교육협력원 규정에 따라 책임자(실/부(팀)장급 이상)로 보임된 이력이 있는 경우에 한함(없을 경우 상기 표 상 해당사항 없음 명기 후 날인)

상기 입찰 및 계약을 수행함에 있어 위에 언급한 내용대로 이행할 것이며, 만일 이의 사실과 다를 경우(축소, 누락포함) 심사대상자에서 제외, 계약해지 또는 해제 및 부정당업자로 입찰참가자격 제한 조치 등 불이익 처분을 받을 경우 일체의 이의를 제기하지 않을 것을 확약하고 이에 확인서를 제출합니다.

2021 년   월    일

확인자	상 호 :
	주 소 :
	대 표 자 :		(인)
(사)에이펙국제교육협력원 이사장 귀하

[별첨 6]

용역·물품 일괄 발주사유서

고려사항	일괄발주 사유
1. 물품·용역 공사 등 각 목적물 유형별 독립성·가분성 2.「건설산업기본법」,「전기공사업법」,「정보통신공사업법」등 공사관련 법령 3. 계약이행 및 관리의 효율성 4. 하자 등 책임구분의 용이성 5. 각 발주방식에 따른 해당시장의 경쟁제한효과	- 본 사업은 해외 교류협력국에 교실 리모델링 공사와 함께 교실에서 활용하는 장비 납품 및 설치를 수행하는 사업으로서, 용역과 물품(소프트웨어 포함)을 분리하여 추진할 경우 납품, 설치, 사후관리 등의 독립적 수행이 불가능함에 따라 통합하여 일괄 발주하는 것이 필요함 - 또한 본 사업은 해외 교류협력국에 첨단 ICT 활용 교실을 구축하는 사업으로 현지 협력국의 관련법을 준용하여 과업을 수행해야 하며, 그에 따라 교실 리모델링 및 환경 구축과 기자재 공급을 일괄 발주하여 현지 관련법령에 대응해야할 필요가 있음 - 관리측면에서 본 사업은 해외 교류협력국 2개국에 대하여 각국에 교실을 공사하고 기자재를 공급하는 사업으로서 현지 공사, 기자재 운송/통관, 설치까지 다양한 변수가 발생할 수 있으며, 이에 대한 총괄적인 대응이 필요함으로 계약의 이행과 관리의 효율성 관점에서도 일괄발주가 필요함 - 과업의 완료 후에는 협력국이 첨단ICT 교실 구축 성과의 지속가능모델을 유지하기 위하여 현지 업체와 교실 및 기자재 관리에 대한 하자 및 유지보수 대책을 수립하여야 하며, 이에 대한 총괄 대응을 위해 일괄발주가 필요함 - 위와 같은 사유로 공적개발원조(ODA)사업인 본 사업이 한국의 첨단 ICT 활용 교실모델을 협력국에 구축하고 지속가능하도록 지원함으로써 해당국의 교육정보화 발전에 기여하고 한국의 국제사회 위상제고를 꾀하기 위해 용역과 물품공급이 포함된 일괄발주가 필요함

[별첨 7]

사업수행지침

가. 일반 유의 사항

질의사항은 답변상의 착오를 방지하기 위해 반드시 공문이나 이메일을 통해 질의 하도록 하고 전화 문의 또는 구두로 질의 응답한 사항은 법적 효력을 갖지 못함

제안내용에 대하여 담합한 사실이 발견되거나 담합하였다고 판단될 경우에는 무효로 처리함

제안사가 제출한 모든 자료 및 정보는 제안사의 권익보호를 위하여 공개되지 않음을 원칙으로 함

제안사는 본 과업을 수행함에 있어 발생하는 저작권, 사용권 또는 특허권 등에 대한 검토․조치를 하여야 하며, 이에 대한 일체의 책임은 제안사에게 있음

제출된 제안서는 최종 계약 대상 업체로의 선정여부와 관계없이 일체 반환하지 아니함

과업수행 과정에서 생산된 각종 보고서, 분석자료 등 모든 성과물에 대한 권리는 계약 관련규정에 따름

본 과업과 관련된 인․허가 등 행정업무는 주관기관의 승인 또는 사전 협의를 통하여 처리함

본 제안요청서에 언급되지 않은 사항, 과업수행으로 인하여 야기되는 제반사항, 어구의 해석 및 관계규정의 적용 등에 대하여 제안사는 에이펙국제교육협력원과 사전 협의하여 결정해야 함

제안사는 과업을 수행함에 있어 과업의 의도와 세부내용을 정확히 파악하고, 에이펙국제교육협력원과 충분한 협의를 거쳐야 하며, 협의된 내용을 시의적절하게 반영하여 수행하여야 함

과업에 참여하는 인력은 관계분야에서 경험이 풍부한 전문인으로 구성하여 과업기간 내에 효율적으로 과업이 완수되도록 하여야 함

제안사는 본 과업수행에 있어 합리적이고 타당한 근거를 바탕으로 한 산출물을 작성하여야 하며 에이펙국제교육협력원의 요구(자료제출 등)가 있을 경우 즉시 이에 응해야 함

본 과업에 활용되는 통계 및 조사 자료는 가능한 최신자료로 하며, 정부 및 공공기관의 공식통계와 신뢰할 수 있는 연구기관의 보고서와 조사결과만을 사용하고 반드시 출처를 명기해야 함

제안의 범위 및 내용 등 제안서 내용에 대하여 협상을 통해 그 내용의 일부를 조정할 수 있음

본 제안요청과 관련하여 취득한 내용에 대한 비밀 유지 및 자료 유출의 책임은 전적으로 제안사에게 있음

본 과업으로 인하여 제안사가 제3자에게 피해를 주었을 경우 제안사 부담으로 손해를 배상하여야 함

과업 수행 중 에이펙국제교육협력원의 사정으로 계획 변경 등이 발생하여 과업이 중지되거나 과업내용이 변경된 경우 과업 내용 및 사업 수행기간 등을 제안사와 협의하여 변경할 수 있음

나. 투입 인력

제안사는 사업을 수행할 조직 및 업무분장 내용을 역할별로 상세하게 제시해야 함

- 사업에 투입할 전체적인 인원 규모를 제시하고 투입되는 인력들에 대한 이력서를 제출해야 함

- 투입인원의 사업 분야별 경력․담당업무를 명확히 기술하여야 함

※ 인력의 질적 수준을 확보하기 위해 필요한 경우 에이펙국제교육협력원은 투입인력의 교체․보완을 요구할 수 있음

분야별 전담인력에 대해 본 사업 수행기간 동안 다른 임무를 부여하지 못하고 특별한 사정이 없는 한 변경할 수 없음. 다만, 퇴직․질병 기타 부득이한 사정이 발생한 경우 에이펙국제교육협력원의 승인을 받아 동급의 인력으로 교체할 수 있음

다. 납품 및 설치

납품 설치 시 파손이나 시험운영 중 하자가 발생하였을 경우 동일규격 이상의 신규제품으로 교체하여야 하며, 설치 중 제반 안전사고 및 납품과정에서 발생하는 행정적, 기술적 제반 비용과 그에 대한 문제 처리는 제안사가 부담함

기자재 설치와 관련하여 각종 환경 설정과 정상 가동에 따른 업무협의 및 보완 사항은 전적으로 제안사의 주관 책임 하에 제조회사, 관련 기관과 협력하여 문제점을 보완하고 정상 가동하도록 함

제안사는 구매 물품 중 위치 또는 설치 방법 등의 사소한 변경이나 주관기관이 지정한 감독원이 요구하는 보완 요청사항에 대해서는 무상으로 지원하여야 함

시스템의 설치 및 테스트 시 속도저하, 장애발생, 기능미비 등의 문제로 인해 사용에 중대한 지장이 있을 경우 수요 기관은 납품 제품의 교체, 대체, 용량 증설, 보완 등을 요구할 수 있으며 제안사는 이에 응해야 함

라. 지적재산권 보호

본 사업을 통해 신규로 계약목적물에 대한 지적재산권이 발생 할 경우 용역계약 일반조건 제56조 1항(기획재정부계약예규 제410호 2018. 12. 31.)에 따라 공동소유 또는 상호 협의하여 최종 결정해야 함

납품 품목으로 인하여 주관기관이 소유권 및 지적재산권 침해에 관한 소송 또는 소송 외의 청구를 당하거나 그로 인한 재판이 결정된 경우 제안사는 자체의 비용과 선택으로 즉시 동 기자재에 대한 계속 점유권과 사용권을 주관기관에게 부여하거나 소유권 및 지적재산권 침해물품과 동급 이상의 물품으로 대체하고 기존 물품은 철거해야 함

제안사는 본 계약에 따라 제안사가 제공한 제품이 국·내외의 지식 재산권을 침해하였다는 이유로 주관기관을 상대로 한 소송이 제기되었을 경우, 제안사의 비용으로 이를 변호하고 주관기관에게 부과된 손해 및 비용에 대하여 보상해야 함

마. 검수 및 검사에 관한 사항

시스템의 납품, 설치와 시스템의 정상 가동 여부에 대한 육안검사, 성능 및 용량 검사 등의 확인 과정을 포함한 검수 실시

육안 검사

- 장비의 내외부의 손상, 결함검사, 제품 정품 확인

- 장비의 연결 상태, 수량 등 육안으로 파악할 수 있는 사항

성능 및 용량 검사 : CPU, 메모리 등 확인

사업자는 검수 요청 전 에이펙국제교육협력원이 정하는 자(전문가, 주교류협력국 한국대사관 관계관, 교류협력국 담당자 등)의 입회하에 각종 현장 시험을 실시하여 시스템의 정상작동 여부를 입증하고, 그 결과 문제가 없을 경우 검수 요청을 하여야 하며, 시험가동 시 발견되는 에러나 불합리한 문제점, 시스템 보완요구 등에 대해서는 즉시 조치하여야 함

납품된 기자재들 기능상 정상적인 수행 여부

검수는 에이펙국제교육협력원이 정하는 자(전문가, 현지대사관 관계관, 교류협력국 담당자 등)의 입회하에 항목별로 시험과정을 관찰하고 결과를 확인하며, 성능 확인 상 필요한 항목을 추가로 지정하여 시험을 지시할 수 있음

검수과정 중 발견된 오작동 및 미비점에 대해서는 사업자가 즉시 수리 및 보완하여야 하며, 에이펙국제교육협력원이 정한 검수요원들의 입회하에 재시험 결과가 확인되어야 함

바. 비밀유지

사업수행과 관련하여 취득한 주관기관 및 해외기관의 보안 및 비밀사항에 대하여 외부에 누설하여서는 안 됨